설계변경 사유서

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 성북천 분수마루 정비공사

○ 공사기간 : 2020. 5. 25. ~ 2020. 9. 10.

○ 공사개요 : 바닥분수 설치 A=55㎡, 분수마루 주변 환경개선 1식

○ 도 급 액 : 금374,714,000원

○ 도 급 자 : 태흥개발(주) 대표 신현종

□ 설계변경 사유

○ 치수과-7875호(2020.5.21.) : 낙찰차액 사용계획

- 건설폐기물 처리용역 발주 등

○ 치수과-15696호(2020.9.7.) : 공사 실정보고

- 토공, 시설물공, 포장공, 부대공 등 현장여건 반영

○ 기타 단순물량 증·감

□ 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감		비 고
총 공사비		427,036,230	469,016,560	증)	41,980,330
도급비	공급가액	340,649,091	352,400,000	증)	11,750,909
	부가치세	34,064,909	35,240,000	증)	1,175,091
	계	374,714,000	387,640,000	증)	12,926,000
관 급 비		29,592,230	38,357,090	증)	14,764,860
이 전 비		18,100,000	31,249,470	증)	13,149,470
폐 기 물		10,630,000	11,770,000	증)	1,140,000