설계변경(1회, 최종) 사유서

□ 공사개요

◦ 공 사 명: 보문로30길 46 ~ 고려대로17가길 78 외 3개소 사각형거 보수공사

◦ 공사기간: 2020. 4. 29. ~ 2020. 11. 20.

◦ 도 급 자: 유남종합건설㈜ 대표 우상선

□ 설계변경사유

◦ 신규공종 및 물량 증․감에 따른 설계변경

구간	공 종	단위	당초	변경	증 ․ 감		비 고
1	단면보수	㎡	898.03	1,107.75	증)	209.72
2	단면보수	㎡	748.70	2,103.	증)	1,354.65
	표면보수	㎡	-	157.16	증)	157.16
3	단면보수	㎡	913.29	1,228.97	증)	315.68
4	제 관 공	㎡	132.00	-	감)	132.00

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ․ 감		비 고
총 공 사 비	1,468,383,440	1,661,291,000	증)	192,907,560
도 급 비	1,436,572,440	1,621,840,000	증)	185,267,560
이 전 비	31,811,000	39,451,000	증)	7,640,000

2020.  11.   .

치수과장  김 윤 기 (인)

성북구(분임)재무관  귀하