설계변경 사유서

□ 용역현황

◦ 용 역 명 : 도로함몰예방 노후하수관로 정비공사(2권역) 건설폐기물 처리용역

◦ 공사기간 : 2019.10.07. ~ 2020.12.31.

◦ 도 급 자 : 동광건설기계 대표 김철기 외 1

□ 설계변경사유

◦ 공사시행(2차분)에 따른 물량 변경

공 종	규 격	단위	시공물량				비고
			당초	변경후	증 ․ 감
					증	감
폐기물처리	폐콘크리트	톤	2,742	5,739	2,997
폐기물처리	폐아스콘	톤	982	978		4
폐기물처리	폐아스콘(평삭)	톤	771	365		406
폐기물운반	폐콘크리트	m3	1,192	2,495	1,303
폐기물운반	폐아스콘	m3	418	417		1
폐기물운반	폐아스콘(평삭)	m3	328	156		172

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ․ 감		비 고
			증	감
총 용 역 비	116,620,000	192,370,000	75,750,000
도 급 비	116,620,000	192,370,000	75,750,000

2020.  12.   .

치수과장  김 윤 기 (인)

성북구(분임)재무관  귀하