설계변경 사유서

□ 공사개요

o 공 사 명 : 2021년 하반기 하천유지관리 공사(연간단가)

o 공사기간 : 2021. 10. 25. ~ 2022. 2. 28.

o 공사규모 : 하천 및 하천시설물 유지관리, 제설대책 등

o 도 급 자 : 영조건설(주) 대표 윤명준

o 도 급 액 : 금313,104,050원(금삼억일천삼백일십만사천오십원)

□ 설계변경사유

o 현장여건 및 작업지시에 따른 공사 물량 증‧감

o ’21 ~ ’22년 제설대책에 따른 물량 및 기타 제경비 변경 등

□ 주요 시공물량 증·감 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증·감		비 고
제설대책(제설작업) 인력(주,야), 기계(로더)	시간	750	2,000	증	1,250
제설대책(상황요원)	시간	200	500	증	300
기계터파기(토사)	㎥	25	2,155	증	2,135
준설토 상차 및 운반	㎥	0	2,155	증	2,155
잡철물 제작 및 설치	톤	1,000	1,857	증	857
석축쌍기	㎡	0	30	증	30
예·제초	㎡	22,000	4,132	감	17,868

□ 공사비 변경내역서                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감		비 고
총공사비	313,104,050	693,138,320	증)	380,034,270
도급비	313,104,050	624,000,000	증)	310,895,950
관급비	-	69,138,320	증)	69,138,320
이전비	-	-		-

2021. 12. 14.

치수과장  김 윤 기 (인)

성북구(분임)재무관  귀하