설계변경 사유서

□ 공사개요

o 공 사 명 : 2021년 하반기 하천유지관리 공사(연간단가)

o 공사기간 : 2021. 10. 25. ~ 2022. 3. 25.

o 공사규모 : 하천 및 하천시설물 유지관리, 제설대책 등

o 도 급 자 : 영조건설(주) 대표 윤명준

o 도 급 액 : 금624,000,000원(금육억이천사백만원)

□ 설계변경사유

o 현장여건 및 작업지시에 따른 공사 물량 증‧감

o ’21 ~ ’22년 제설대책에 따른 물량 및 기타 제경비 정산 등

□ 주요 시공물량 증·감 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증·감		비 고
제설대책(제설작업) 인력(주,야), 기계(로더)	시간	2,000	570	감	1,430
제설대책(상황요원)	시간	500	0	감	500
인력소운반(소각폐기물)	㎥	18	1,461	증	1,443
데크난간보수	개소	0	34	증	34
사다리 안전망 설치	m	0	33	증	33
예·제초	㎡	4,132	9,323	증	5,191

□ 공사비 변경내역서                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감		비 고
총공사비	693,138,320	686,713,860	감)	6,424,460
도급비	624,000,000	623,990,000	감)	10,000
관급비	69,138,320	62,723,860	감)	6,414,460
이전비	-	-		-

2022. 3.  .

치수과장  김 윤 기 (인)

성북구(분임)재무관  귀하