설계변경 사유서

□ 공사개요

o 공 사 명 : 고려대로17가길 15-4 외 10개소 하수관로 개량공사

o 공사기간 : 2022. 4. 1. ~ 2022. 10. 14.

o 공사규모 : 하수관 개량 D300~600mm, L=784m

o 도 급 자 : 태평로건설(주) 대표 류 지 연

o 도 급 액 : 금943,636,900원(금구억사천삼백육십삼만육천구백원)

□ 설계변경사유

o 공사 현장실정보고및 작업지시에 따른 물량 변경

o 기타 실 시공물량 증·감사항에 대한 물량 정산

o 제경비(건강·연금보험료, 산업안전보건관리비, 환경보전비 등) 정산금액 반영

□ 주요 시공물량 증·감 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증·감		비 고
흄관부설 (D300mm)	m	131	107	감	24
흄관부설 (D450mm)	m	450	615	증	165
흄관부설 (D600mm)	m	203	152	감	51
하수관 천공 및 접합	개소	157	233	증	76
아스팔트 절삭 후 포장	a	20.15	24.91	증	4.76
차선도색	㎡	0	77	증	77

□ 공사비 변경내역서                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감		비 고
총공사비	943,636,900	943,568,640	감)	68,260
도급비	732,536,900	745,000,000	증)	12,463,100
관급비	103,321,000	134,938,640	증)	31,617,640
이전비	107,779,000	63,630,000	감)	44,149,000

2022. 10. 11.

치수과장  김 윤 기 (인)

성북구(분임)재무관  귀하