설 계 변 경 사 유 서

□ 공 사 현 황

○ 공 사 명 : 교량 및 복개구조물 일상유지보수공사

○ 공사기간 :  2013. 03. 12 ~ 2014. 02. 28

○ 대상시설물 현황

- 시설물명 : 교량 및 복개구조물

- 위    치 : 성동구, 중랑구, 동대문구, 광진구

○ 공사개요

- 콘크리트 단면보수      A= 638.0㎡

- 콘크리트 표면보수      A= 817.4㎡

- 콘크리트 균열보수      L= 120.1m

○ 계약금액 : 금547,392천원

○ 도 급 자 : 충정종합건설(주) 대표 김성복

□ 설계변경 사유

○ 시공물량 증감

○ 용비교 강교 박스내 조명시설 설치, 황학교 조류접근방지망 설치 등

신규공종 발생

□ 설계변경 내역(금액변경 없음)

단위 : 원

구 분		당 초	변 경	증 감
용역비	계	547,392,000	547,392,000	-
	공급가액	497,629,092	497,629,092	-
	부가가치세	49,762,908	49,762,908	-

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.