설 계 변 경 사 유 서

1. 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사(장기계속공사)

2. 공사개요

- 공사내용 : 호랑이방사장 확장, 내실보수, 기반시설 정비 등

- 총공사비 : 2,589,640,330원 (도급액 2,520,213,000원, 관급비 69,427,330원)

※ 도급액 : 총2,520,213,000원 (1차분 856,198,330원, 2차분 1,664,014,670원)

3. 사업기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 7. 4

4. 도 급 자 : 미래종합조경(주) 주정수, ㈜신영그린시스 심재홍

5. 주요변경사유

○ 현장여건에 따른 실시공물량 정산 반영

○ 주요 변경내용

- 조경 : 안전휀스 출입문 (2 → 3개소)

- 건축 : 내실 기계휘니셔 (334 → 0㎡)

- 토목 : 관기초, 터파기 및 되메우기, 조경석쌓기 등 실시공 물량으로 정산

※ 도급비 변경없음