설 계 변 경 사 유 서

1. 공 사 명 : 서울대공원 치유숲길 조성공사

2. 공사개요

- 공사내용 : 숲길 정비, 치유공간 조성, 수목식재 등

- 총공사비 : 429,791,900원 (도급액 340,837,900원, 관급비 88,954,000원)

3. 사업기간 : 2015. 10. 16 ~ 2015. 12. 24

4. 도 급 자 : ㈜고려원조경 이수희

5. 주요변경사유

○ 체조데크 등 시설물 규모 조정 및 물량변경

○ 수목식재 물량 변경 및 봄가을 꽃 식재 반영

○ 기타 현장여건에 따른 실시공물량 정산 반영