□ 설계변경 소위원회 자문요청 목록

○ 공사명 : 종로 중앙버스전용차로 설치공사                                                     2018. 01. 29.

연번	건 명	변 경 사 유	금 액(천원)			비고
			당 초	변 경	증 / 감
1	가설휀스 설치 및 해체 변경	▷ 시민과 통행차량의 안전을 위해 당초 반가림막휀스(3.0×1.0)을 가림막휀스(2.0×1.2)으로 변경하고 휀스를 추가설치하여 구간별 후속공정을 순차적으로 병행 시공하여 공기단축을 추진하고 2017년내 중앙버스 전용차로 개통 추진.	19,514	423,863	증 404,349
2	아스팔트깨기 (평삭) 변경	▷ 당초 중앙차로 아스팔트깨기가 평삭20cm(7cm×3회)+터파기(또는 브레카) 10cm로 되어 있는 것을 15cm×2회로 변경하여 시공성을 향상시키고 공기단축을 시행하여 2017년말 중앙버스 전용차로 개통 추진.	229,856	360,668	증 130,812
3	이동식정류소 초속경콘크리트 타설	▷ 2017년말 중앙버스전용차로 개통을 위한 절대공기 부족을 극복하고 후속작업(이동식 모듈설치, 전기,통신등)이 원활하게 진행될 수 있도록 이동식 정류장 4개소에 기초 뒤채움콘크리트를 초속경콘크리트로 타설하여 시공.	-	243,100	증 243,100
4	횡단보도주변 보도정비 및 이동식정류소 추가 등 세부설계도서 제출건 내역 변경	▷ 교통운영과-20874호(2017.11.01.) 및 도시기반시설본부-17-10627호(2017.11.06.)와 관련하여 추가공사(이동식 승강장 및 횡단보도 턱낮춤, 보도정비) 시행으로 인한 설계도서 배포 및 변경 사항을 내역에 반영코자함.	3,840,576	5,738,473	증 1,897,897
합 계			4,089,946	6,766,104	증 2,676,158