□ 설계변경 소위원회 자문요청 목록

○ 공사명 : 종로 중앙버스전용차로 설치공사                                                     2018. 07. 03.

연번	건 명	변 경 사 유	금 액(천원)			비고
			당 초	변 경	증 / 감
1	교통소통대책 용역비	▷ 복잡한 도심지 공사를 시행함에 있어 원활한 교통소통대책 수립을 위한 교통소통대책 용역시행 및 용역비 반영.	-	219,450	증 219,450
2	충격방지 흡수시설 설치	▷ 버스승강장 테이퍼구간에 차량 충격흡수시설을 설치하여 승강장시설물 보호, 보행자 안전 및 운전차량의 안전을 확보코자 시행	-	221,110	증 221,110
3	신설횡단보도 주변 화강판석 임시포장(1차 돌관공사	▷ 버스중앙차로 2017년말 개통에 따른 횡단보도 낮춤석구간 보도(화강판석)를 돌관공사로 시행하고 동절기 날씨를 고려하여 건식 가포장으로 시공	-	368,236	증 368,236
4	동절기 콘크리트 타설시 보온양생	▷ 2017년말 중앙버스전용차로 개통에 맞춰 동절기 일평균기온 –6℃에서 돌관공사를 시행하고 이동식 버스승강장 기초콘크리트 타설후 동결피해를 방지코자 보온양생을 실시	-	130,800	증 130,800
5	이동식 정류장 구조물 터파기 투입장비 및 인원변경	▷ 이동식 승강장 구조물터파기시 지하 및 주변 상가의 민원소음을 최소화하고자 구조물깨기 및 터파기시 투입장비 및 작업방법 변경으로 작업효율 저하에 따른 추가공사비 반영	13,206	88,600	증 75,394

연번	건 명	변 경 사 유	금 액(천원)			비고
			당 초	변 경	증 / 감
6	교통안전시설물 추가 설치	▷ 공사구간 극심한 교통체증 및 시민들의 불편에 따른 민원제기로 경찰청 및 유관기관으로부터 안전시설물 설치 및 홍보요청에 따른 교통안전시설 추가 설치.	86,065	262,300	증 176,235
7	교차로 아스콘 표층 포장	▷ 종로 중앙버스전용차로 설치공사중 북부도로사업소에서 교차로구간 추가 포장 요청에 따른 교차로부 포장 시행	-	191,300	증 191,300
8	버스도착 안내 단말기(BIT)설치	▷ 이동식 버스승강장에 버스이용자의 편의를 위한 버스정보안내단말기(BIT)를 설치하고 내역에 반영	-	224,752	증 224,752
9	중앙차로 무단횡단금지 휀스 이동형 설치	▷ 중앙차로에 무단횡단 방지를 위한 이동형휀스 하부 1,060경간 설치	-	243,991	증 243,991
10	교통안전시설(속도제한 하향표지판) 설치	▷ 2018년 제3차 교통안전시설 심의 결과를 반영하여 공사구간내 차량제한속도(하향) 표지판을 설치	-	115,170	증 115,170
합 계			99,271	2,065,709	증 1,966,438