설계변경소위원회 3단계 공구별 자문대상(1차)

(단위: 백만원)

연번	구 분	설계변경 요청금액						계 (건수)	비고
		918공구	919공구	920공구	921공구	922공구	923공구
1	강재손료	1,073	3,963	3,624	2,809	3,708	4,316	6
2	공사용 조명	289	456	889	693	428	128	6
3	가로등 복구	293	237	187	211	97	202	6
4	자전거주차장	-176		-368				2
5	차수벽 해체	130						1
6	지수재 변경	73						1
7	채움재 변경	59						1
8	보호벽 변경	-53						1
9	#1환기구 마감벽 시·종점 가시설 변경			-261				1
10	#1환기구 측벽 락볼트 변경			53				1
11	개착구간 측벽 가시설 변경			-391				1
12	구조물 방수 보호벽 변경			-80				1
13	쉴드터널 1,2구간 후방레일 변경			-473				1
14	비개착U.P.R.S공법(웅산빌딩)			91				1
15	#4환기구 가시설 변경 및, 터널2 그라우팅 삭제			-487				1
16	송파근린공원 E/A 제거			-208				1
17	터널2구간 발진부 지하작업장 변경			198				1
18	934정거장 2차 재사용강재 사용			-153				1
19	934정거장 2차 차수그라우팅 변경			-197				1
20	934정거장 2차 가시설 변경			-74				1
21	소마미술관 변경				429			1
22	재사용 강재 정산						-219	1
23	937S2지보재 변경						82	1
24	938정거장 지보재 변경						82	1
25	938정거장 암굴착 변경						501	1
26	938E1 환기덕트 위치 변경						-238	1
27	간이검수시설 궤도구조 변경						-80	1
28	일자산 조경						-58	1
29	보도육교 삭제						-140	1
계 (29 공종)		1,688	4,656	2,350	4,142	4,233	4,576	45건