설계변경 심의 요청서

접수번호	제 호

공사명	암사아리수정수센터 1정수장 역세송풍기 및 배관교체공사

심의일시: 2014.07.31

심의장소: 정수시설과

암사아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 사유서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 암사아리수정수센터 1정수장 역세송풍기 및 배관교체공사

○ 공사개요

- 역세송풍기(115KW×2대) 자동제어설치 교체

- 에어배관교체 350mm×141m

- 기타 부대설비 1식

○ 계약업체 : 일성설비(주) 대표 김 형 옥

○ 공사기간 : 2014.04.28 ~ 2014.08.25

○ 계약금액 : 256,686,160원

□ 설계변경 사유

○ 3계열 역세송풍기가 심하게 고장, 수리불가 하여(2015년 교체예정)

○ 4계열에 설치할 송풍기 2대중 예비용 1대를 3계열에 설치, 정상운전 상태 확보하고

○ 송풍기 변경설치 및 보험료 정산 등에 따른 설계변경

□ 심의내용

○ 시공물량 변동

○ 공종 일위대가 산출

○ 송풍기 변경설치 및 보험료 정산 등에 따른 설계변경 내용

○ 시공물량 증감 내역

공 종	규 격	단 위	물 량 내 역		증 ․ 감
			당초	변경
F-CV케이블	F-CV 150SQ, 3C	m	60	70	증10
후렉시블전선관	28mm	m	0	16.6	증 16.6
배관부자재	엘보,플랜지,레듀샤,볼트너트 등	개		내역서참고	증

○ 설계변경 내역

공 종	도 급 액		증 ․ 감	주요변경사유
	당초	변경
도 급 액	256,686,165	254,326,678	(감) 2,359,487
역세송풍기 및 자동제어	130,858,296	131,594,556	(증) 736,260	시공물량 정산
에어배관교체	71,703,229	71,703,229	-
건강,연금, 노인 장기요양보험료 산업안전보건관리비	4,958,124	2,466,569	(감) 2,491,555	납입내역 사후정산
기타 제잡비	49,166,516	48,562,324	(감) 604,192

붙 임 : 변경설계서 1부. 끝.