설계변경심의요청서

건 명	‘16년 한강야외수영장보수공사(토목)

요청기관명	기반시설과
요청연월일	2016년 9 월

첨부 : 공사중 설계변경 설명서 1부.

공사중 설계변경 설명서
공 사 명	‘16년 한강야외수영장보수공사(토목)	요청기관 (사업시행부서)		기반시설과
공사위치	수영장6개소 물놀이장2개소
공사기간	2016. 3.23 ~ 2016. 9.30
공사금액	(당초) 총공사비 : 1,622,729천원		(변경) 총공사비 : 1,624,529천원 - 증액 : 1,839천원
보상금액	- 천원		금회 증액 보상비 : - 천원
보완설계 계약방법	계약금액 증액		보완설계 용역비용 : - 천원
사업구분	일반공개경쟁 입찰공사
○ 주요공사내용 • 타일시공 : 7,200㎡ ⇒ 7,200㎡ • 탑코팅 : 11,267㎡ ⇒ 13,409㎡ • 수성도색 : 2,997㎡ ⇒ 2,997㎡ • 오일스텐 : 2,075㎡ ⇒ 4,478㎡ • 균열보수: 230m ⇒ 562m ○ 주요변경사항 • ‘15년도 준공된 시설인 양화물놀이장 수조 도장의 문제로인한 탑코팅 시행 - 전년도 준공된 시설인 양화물놀이장 개장후 도장이 묻어나는 현상 으로 탑코팅 실시 • 뚝섬 수영장 성인,유아풀 균열보수실시 - 수조 내부 타일시공을 위하여 당초 시공된 폴리우레아 포장 제거한바 바닥에 균열다수 발생하여 하자 방지를 위하여 균열보수실시 • 뚝섬 수조 타일시공실시한바 바닥에 설치된 급수구(인레트휘팅,배수구) 단차발생으로 인상등조정필요 • 광나루,잠실,망원수영장 입구 콘크리트 포장부분 상태양호하여 포장물량제외 • 여의도수영장, 난지물놀이장 목재데크 변색,탈색으로 오일스텐 도장 실시
○ 첨부 서류 1. 공사중 설계변경 사유서 2. 설계변경내역서

공사중 설계변경 사유서

사업시행 부서 작성자	부서명: 기반시설과 성 명: 김일문	(☏ 3780-0676)

사업명 : 16년 한강공원야외수영장보수공사(토목)

가. 사업개요

○ 위    치 : 수영장6개소, 물놀이장2개소

○ 사업기간

- 당초 : 2016. 3.23.  ~ 2016. 9.30.

- 변경 : 변경없음

○ 도급비 : 1,321,402,870천원

항 목	당 초	변 경	증 감
총공사비	1,622,729,870	1,624,569,000	증1,839,130
도 급 비	1,321,402,870	1,384,383,000	증62,980,130
관 급 비	272,060,000	234,870,800	감37,389,150
이 설 비	29,067,000	5,316,000	감23,751,000

나. 설계변경 사유

○ 설계변경 주요내용

․양화물놀이장 수조 긴급 탑코팅실시

․뚝섬수영장 수조내 성인풀, 유아풀 균열보수실시

․뚝섬,여의도,망원수영장 배수구 인상

․뚝섬,난지 물놀이장 데크 오일스텐 추가 작업

․광나루,잠실,망원 수영장 입구 아스콘 포장물량 제외

․기타 바닥 물빠짐 불량구간 배수구정비 및 그레이팅 파손 교체등실시

○ 변경 사유

․양화물놀이장 탑코팅: 공사전 전년도 준공시설로 바닥 균열이 있어 균열보수는 실시하였으나 개장한바 기존 도장재인 000가 초킹현상으로 이용자들의 몸에 묻어남으로 임시 폐장조치 하고 긴급 탑코팅 실시로 수량 증가

․뚝섬수영장 성인,유아풀 타일시공을 위하여 기존 바닥재 제거한바 바닥에 다수 균열이 발견되어 균열보수 수량 증가

․여의도,망원 수영장내 데크부분 변색 및 탈색등으로 오일스텐 작업 실시고 수량증가

․기타 배수구정비,두겁부보수 및 포장물량 제외등 보수물량 증·감

다. 설계변경 필요성

○ 공사감독 수행 중 설계변경 사유 발생

- 실정보고 시행(본부장방침 및 부장방침)

라. 설계변경의 적법성 및 관련계획과의 연계성

마. 사업계획변경 추진에 따른 제약요인 및 재원조달 가능성

○ 사업추진 제약요인 : 없음

○ 재원 조달 가능성 : 가능

- 도급비증액 : 62,980,130원

- 이설비,집행잔액등 사용 : 246,328천원

⇒ 관련방침 : 기반시설과-2722(‘16.17.19 본부장방침)

기반시설과-1639(‘16.5.11),

기반시설과-1077(’16.6.3)

붙임 : 현황사진 1부. 끝.

사    진    대    지

사진설명	타일시공(뚝섬수영장)
사진설명	타일시공(망원수영장)

사진설명	타일시공(여의도수영장)
사진설명	탑코팅(양화물놀이장)

사진설명	양화물놀이장 탑코팅
사진설명	뚝섬수영장 균열보수

사진설명	음수대주변 정비(망원 수영장)
사진설명	오일스텐(난지물놀이장)