설계변경 심의자료

가. 공사명 : 2014년 전기시설물 유지보수공사

나. 제  목 : 설계변경심의

다. 일  시 : 2014. 11.1.(월) 09:00

라. 참석자 : 시설관리과장, 6급 손병희, 6급 최명익, 6급 이태원

6급 이병운, 6급 오도영

마. 공사개요 :

◦ 가압장·배수지등 전기시설물 보수 및 교체공사

◦ 가압장·배수지등 등기구 정비 및 배선공사

◦ 기타 정비가 필요한 시설물에 대한 정비공사

바. 계약기간 : 2014. 03. 11. ~ 2015. 2. 28.

사. 공사금액

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비 (부가세포함)	86,283,740원	89,870,000원	증)3,586,260

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용

1. 공사 현황

가. 공사명 : 2014년 전기시설물 유지보수공사

나. 공사개요 :

◦ 가압장·배수지등 전기시설물 보수 및 교체공사

◦ 가압장·배수지등 등기구 정비 및 배선공사

◦ 기타 정비가 필요한 시설물에 대한 정비공사

다. 계약기간 : 2014. 03. 11. ~ 2015. 2. 28.

라. 수 급 인 : 현대전기건설공사   대표 이건돈

2. 설계변경 사유보고

가. 공사중 물량 증·감 사항 발생

- 물량증가 : 접지봉설치(접지봉 14Φ×1000 mm) 등 30개 공종

- 물량감소 : 접지선 설치(10㎟) 등 118개 공종

나. 신공종 및 신규자재 발생

- 신규공종 : 서지보호기(1등급)설치 등 77개 공종

- 서지보호기(3Ø4W 20KA,KS인증,1등급) 등 50개 품목 신설

다. 경비부분 중 건강보험료, 연금보험료 등 증빙이 될 수 없는 부분에 대해서 감액

3. 설계변경 검토결과

가. 물량이 증·감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

나. 도급액 범위 내에서 물량변동

다. 신 공종에 대해 낙찰률을 적용

붙 임: 설계변경내역서 1부.  끝.

□ 심의위원회 의견

- 우리사업소 관내 “2014년 전기시설물 유지보수공사” 설계변경에 따른 사전심의 결과 다음과 같이 의견을 제시함

구 분	직 위	의 견	서 명
위원장	시설관리과장
위 원	6급 최명익
위 원	6급 한상근
위 원	6급 이병운
위 원	6급 오도영
간 사	6급 손병희

2014.11.1.