설계변경 심의자료

가. 공사명 : 2013년 석관동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 제  목 : 설계변경심의-3차

다. 일  시 : 2014. 1. 17.(금) 오전 10:00

라. 참석자 : 시설관리과장, 6급 이일환, 6급 채재일, 시설6급 이태원,

시설6급 이병운, 시설6급 최명익

마. 공사개요 :

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	13~300mm	1,396m
변 경	13~300mm	1,487m	증) 91m

바. 공사기간 : 2013. 07. 09 ~ 2014. 06. 30

사. 공사금액 :

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비 (VAT포함)	600,367,900원	600,367,900원	-

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용

1. 공사 현황

가. 공사명 : 2013년 석관동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 :

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	13~300mm	1,396m
변 경	13~300mm	1,487m	증) 91m

다. 공사기간 : 2013. 07. 09 ~ 2014. 06. 30

라. 수 급 인 : (주)장수티엔시 대표 박창군

2. 설계변경 사유보고

가. 공사중 물량 증.감 사항 발생

- 물량증가 : 아스팔트포장절단 100~150mm 적용 등 130개 공종

- 물량감소 : 인력터파기 견질토사 1-2m 등 148개 공종

나. 신공종 발생

- 부단수할정자관부설및접합공  150mm 등 8개 공종

3. 설계변경 검토결과

가. 물량이 증.감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

나. 도급액 범위내에서 물량변동

다. 신공종에 대해 낙찰율을 적용

붙 임: 설계변경내역서 1부.  끝.

□ 심의위원회 의견

- 우리사업소 관내 “2013년 석관동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)” 설계변경(3차)에 따른 사전심의 결과 다음과 같이 의견을 제시함

구 분	직 위	의 견	서 명
위원장	시설관리과장
위 원	6급 최명익
위 원	6급 이일환
위 원	6급 이병운
위 원	6급 채재일
간 사	6급 이태원

2014.1.17