설계변경(2회) 요약보고서

공사명	2014년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약) 제2회 설계변경

신청부서명	시설관리과
작 성 자	강 병 국
제출년월일	2014. 12.

설계변경에 따른 요약보고서

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 2014년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

ㅇ 계약일자 : 2014년 04월 18일

ㅇ 공사기간 : 2014. 04.21 ~ 2015. 06. 30

ㅇ 공사개요 :

당초 : D=13~300㎜,L=  979m

변경 : D=13~300㎜,L=  990m

ㅇ 수 급 인 : (주)보림프러스  대표 김병관

ㅇ 도 급 비 : 504,427,421원(변동없음)

□ 설계변경 사유

ㅇ 신규공종 발생

- 원형철개설치공 외 70개 공종

ㅇ 물량증감

- "아스팔트 포장절단(100~150mm)외 171개 공종

□ 계약금액 조정 내용                                        (단위 : 원)

구 분	총부기금액		비고
	당초	변경
총 공 사 비	709,724,421	709,724,421	-
도 급 비	504,427,421	504,427,421	-
관급자재비	205,297,000	205,297,000	-

□ 심의 위원회 의견

『2014년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』설계변경(2차)에 따른 사전심의 결과 다음과 같이 의견을 제시함.

구 분	직 위	성 명	심의결과
위원장	시설관리과장	박 길 영 (인)
위원	시설주사	김 홍 준 (인)
위원	시설주사	강 동 철 (인)
위원	시설주사	이 준 호 (인)
위원	시설주사	김 찬 모 (인)
간사	시설주사	천 성 훈 (인)

2014. 12.   .

서부수도사업소 심의위원회