설계변경 요약보고서

공사명	2015년 기계설비보수공사(연간단가)

부서명	정수시설과
작 성 자	송 종 봉
제출년월일	2015. 09.

설계변경 요약보고서

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2015년 기계설비 보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015. 4. 27 ~ 2016. 03. 31

다. 도 급 액 : 92,376,000원

라. 공사개요

1) 모터펌프6대 수리        2) 청소용배관 설치

3) 중염소투입배관교체      4) 탈수기 구동감속기 등 배출수처리시설 보수

5) 크레인 보수 등

마. 도 급 자 : (주)유진아이엔비  대표  정 요 한

2. 보 고 내 용

가. 설계변경사유

1) 당초 기계설비 수리를 위해 연간단가계약을 추진하였으나 당초 계약물량과 상이하여 정산코자 하며, 청소용배관설치, 중염소투입배관교체, 탈수기 구동감속기 보수, 크레인보수 등 신규물량에 대하여 설계변경에 반영코자 함.

2) 작업지시에 의한 신규공종 및 물량증감 내용

- 신규공종 : 청소용배관설치, 중염소투입배관교체, 탈수기 구동감속기 외 배출수처리설비 보수, 크레인보수 등

- 시공물량 증감 : 모터펌프수리, 도장, 이산화탄소 주입설비보완 등 물량증감

3) 주요공종 수량변경내용

공 종	단 위	수 량		비 고(증․감)
		당 초	변 경
모터펌프 수리	대	4	6	증) 2
이산화탄소 주입설비 보완	식	1	0	감) 1
기타 설비보수	식	1	0	감) 1
청소용배관설치	식	0	1	증) 1
중염소투입배관교체	식	0	1	증) 1
배출수처리시설 정비	식	0	1	증) 1
크레인보수	식	0	1	증) 1

4) 공사비 변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
합 계		92,376,000	101,244,000	+8,868,000
도급비	계	92,376,000	101,244,000	+8,868,000
	공급가액	83,978,182	92,040,000	+8,061,818
	부가세	8,397,818	9,204,000	+806,182
관급자재비 등		0	0	0

5) 보험료 및 경비 정산내용

구 분		산출금액	정산금액	증․ 감	비 고
합 계		3,638,203	1,311,582	-2,326,621
경비	건강보험료	923,795	0	-923,795
	연금보험료	1,353,088	0	-1,353,088
	노인장기요양보험료	60,508	0	-60,508
	산업안전보건관리비	1,024,044	1,311,582	+287,538	내역서
	환경보전비	276,768	0	-276,768

따로붙임  1. 설계변경 내역서 1부

2. 보험료 완납증명서 1부

3. 산업안전보건관리비 내역서 1부  끝.