별 첨 1】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	1	요청부서		방재시설부			요청일	2014년 05월 일
공 사 명	용허리 빗물저류조 설치공사
공사개요	공사규모		빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
	공사기간		2012. 12. 21 ~ 2014. 05. 30
	감 리 사		㈜신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		현대엔지니어링㈜외 2개사
	시 공 사		케이월드종합건설㈜외 1개사
자문 안건명			철근 외부가공 수량정산			요청금액			증 22,726 천원
자문요청사유			▢ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 철근가공장 및 야적장으로 사용할 적합한 공간이 없어 외부 철근가공장을 사용함으로 인한 철근 운반거리 정산.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초 : 철근운반비 공장 → 현장 - 변경 : 철근운반비 공장→가공장→현장 ▪ 물량 증감내역 - 당초 : 공장→현장 816.192 ton - 변경 : 공장→현장 284.284 ton 공장→가공장→현장 531.908 ton - 증감 : 공장→현장 감)531.908 ton 공장→가공장→현장 증)531.908 ton					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 15,444 천원 - 변 경 : 38,170 천원 - 증 감 : 증 22,726 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 저류조 - 부대공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 설계내역서 1부.						▪ 공사예정시기 : 2013년 월

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용허리공원 빗물저류조 설치공사
계약금액	7,625,521 천원	계약일	2012.12.18	시공사	케이월드종합건설(주)외1개사
공사기간	2012.12.21 ~ 2014.05.30	낙찰율	85.496%	설계자	현대엔지니어링㈜외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜신명건설기술공사외 2개사
공사규모	○ 빗물저류조 V=15,000㎥ ○ 유입관로 L=237.45m (2.0×1.5@1) ○ 조경공사 1식			※ 작성자 : 업무담당 방재안전시설부 한종수 (☎ 3708-8772)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	철근운반비 공장→현장 816.192 ton		철근운반비 공장→현장 284.284 ton 공장→가공장→현장 531.908 ton	공장→현장 감)531.908 ton 공장→가공장→현장 증)531.908 ton
공 사 비	15,444 천원		38,170 천원	증 22,726 천원
적 용 요 율			낙찰율 85.496%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	철근가공장 및 야적장으로 사용할 적합한 공간이 없어 외부 철근가공장을 사용함으로 인한 철근 운반거리 정산.
효 과	① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

- 잠원2감 2014-65호(14.02.21) 실정보고 (감리단 → 도기본)

- 방재시설부- 2661호(14.05.07) 실정보고 승인통보(도기본 → 감리단)

- 잠원2감 2014-132호(14.05.08) 실정보고 승인통보(감리단 → 시공사)

별 첨 1】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	2	요청부서		방재시설부			요청일	2014년 05월 일
공 사 명	용허리 빗물저류조 설치공사
공사개요	공사규모		빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
	공사기간		2012. 12. 21 ~ 2014. 05. 30
	감 리 사		㈜신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		현대엔지니어링㈜외 2개사
	시 공 사		케이월드종합건설㈜외 1개사
자문 안건명			지반보강(LW) 및 쉬트파일 인발(유압식)			요청금액			증 101,640 천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 가시설해체로 인한 민원해소 및 인접건물의 균열,침하를 방지하기 위하여 쉬트파일 인발방법(진동식 > 유압식)변경 및 지반보강그라우팅(LW)으로 보강하여 변경하고자 함.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초 : 쉬트파일 항발(진동식) - 변경 : 쉬트파일 항발(진동식/유압식) 지반보강(LW그라우팅) ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 쉬트파일 항발(진동식) - 510 본 - 변 경 : 쉬트파일 항발(진동식) - 402 본 쉬트파일 항발(유압식) - 108 본 지반보강(LW) - 30M/60공 - 증 감 : 쉬트파일 항발(진동식) 감(108본) 쉬트파일 항발(유압식) 증(108본) 지반보강(LW) 증(30M/60공)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 33,330 천원 - 변 경 : 134,970 천원 - 증 감 : 증 101,640 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 저류조 - 가시설공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 설계내역서 1부.						▪ 공사예정시기 : 2014년 월

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용허리공원 빗물저류조 설치공사
계약금액	7,625,521 천원	계약일	2012.12.18	시공사	케이월드종합건설(주)외1개사
공사기간	2012.12.21 ~ 2014.05.30	낙찰율	85.496%	설계자	현대엔지니어링㈜외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜신명건설기술공사외 2개사
공사규모	○ 빗물저류조 V=15,000㎥ ○ 유입관로 L=237.45m (2.0×1.5@1) ○ 조경공사 1식			※ 작성자 : 업무담당 방재안전시설부 한종수 (☎ 3708-8772)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	쉬트파일 항발(진동식)-510본		쉬트파일 항발(진동식)-402본 쉬트파일 항발(유압식)-108본 지반보강(LW)그라우팅-30M/60공	항발(진동식)-감)108본 항발(유압식)-증)108본 LW그라우팅-증)60공
공 사 비	33,330 천원		134,970 천원	증 101,640 천원
적 용 요 율	낙찰율 85.496%		협의율 92.748%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	계약예규 공사계약일반조건 제20조1항내지 2항
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	가시설해체로 인한 민원해소 및 인접건물의 균열,침하를 방지하기 위하여 쉬트파일 인발방법(진동식 > 유압식)변경 및 지반보강그라우팅(LW)으로 보강하여 변경하고자 함.
효 과	① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

- 잠원2감 2014-128호(14.05.02) 실정보고(감리단 → 도기본)

- 방재시설부- 2674호(14.05.07) 실정보고 승인통보(도기본 → 감리단)

- 잠원2감 2014-132호(14.05.08) 실정보고 승인통보(감리단 → 시공사)

별 첨 1】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	3	요청부서		방재시설부		요청일	2014년 05월 일
공 사 명	용허리 빗물저류조 설치공사
공사개요	공사규모		빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
	공사기간		2012. 12. 21 ~ 2014. 05. 30
	감 리 사		㈜신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		현대엔지니어링㈜외 2개사
	시 공 사		케이월드종합건설㈜외 1개사
자문 안건명			지하매설물 조사		요청금액			증 29,629 천원
자문요청사유			▢ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공사구간내 지장물 확인을 위한 터파기 및 도로 복구.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초 : - 변경 : 지장물 확인 ▪ 물량 증감내역 유입관거 - 당초 : - 변경 : 지장물 터파기 371㎥/되메우기 292㎥/포장 138㎡ - 증감 : 지장물 터파기 증)371㎥/되메우기 증)292㎥/포장 증)138㎡						▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 변 경 : 29,629 천원 - 증 감 : 증 29,629 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 유입관거 - 부대공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 : 2013년 월

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용허리공원 빗물저류조 설치공사
계약금액	7,625,521 천원	계약일	2012.12.18	시공사	케이월드종합건설(주)외1개사
공사기간	2012.12.21 ~ 2014.05.30	낙찰율	85.496%	설계자	현대엔지니어링㈜외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜신명건설기술공사외 2개사
공사규모	○ 빗물저류조 V=15,000㎥ ○ 유입관로 L=237.45m (2.0×1.5@1) ○ 조경공사 1식			※ 작성자 : 업무담당 방재안전시설부 한종수 (☎ 3708-8772)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요			지장물 터파기 371㎥ / 되메우기 292㎥/포장 138㎡	지장물 터파기 371㎥ / 되메우기 292㎥ / 포장 138㎡
공 사 비			29,629 천원	증 29,629 천원
적 용 요 율	낙찰율 85.496%		낙찰율 85.496%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	공사구간내 지장물 확인을 위한 터파기 및 도로 복구.
효 과	① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

- 잠원2감 2014-130호(14.05.02) 실정보고(감리단 → 도기본)

- 방재시설부- 2686호(14.05.07) 실정보고 승인통보(도기본 → 감리단)

- 잠원2감 2014-132호(14.05.08) 실정보고 승인통보(감리단 → 시공사)

별 첨 1】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	4	요청부서		방재시설부		요청일	2014년 05월 일
공 사 명	용허리 빗물저류조 설치공사
공사개요	공사규모		빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
	공사기간		2012. 12. 21 ~ 2014. 05. 30
	감 리 사		㈜신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		현대엔지니어링㈜외 2개사
	시 공 사		케이월드종합건설㈜외 1개사
자문 안건명			저류조 및 유입관로 가시설		요청금액			증 56,400 천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 저류조 토공 암발생으로 인한 가시설 공법변경, 가시설공사 침수 방지용 PE배수로 설치 및 서초대로횡단부 지장물 저촉으로 유입관로 종단구배 조정에 의한 가시설변경.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 저류조 - 당초 : 쉬트파일 / 변경 : 쉬트파일+H파일/가배수로 유입관거 - 당초 : 쉬트파일+H파일+토류판 / 변경 : H파일+토류판,복공판 ▪ 물량 증감내역 저류조 - 당초 : 쉬트파일 695 TON / H파일 58 TON - 변경 : 쉬트파일 486 TON / H파일 127 TON / PE배수로 226 M - 증감 : 쉬트파일 감)209 TON / H파일 증) 69TON / PE배수로 증)226M 유입관거 - 당초 : 쉬트파일 309 TON / H파일 220 TON / 토류판 1,094 ㎡ 터파기 4,773 ㎥ / 잔토처리 5,086 ㎥ - 변경 : H파일 328 TON / 토류판 2,642 ㎡ 터파기 5,303 ㎥ / 잔토처리 5,267 ㎥ - 증감 : 쉬트파일 감)309 TON / H파일 증)109TON / 토류판 증)1,548㎡ 터파기 530 ㎥ / 잔토처리 181 ㎥						▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 2,909,240 천원 - 변 경 : 2,965,640 천원 - 증 감 : 증 56,400 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 저류조 - 가시설공/부대공 - 유입관거 - 토공/가시설공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 : 2013년 월

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용허리공원 빗물저류조 설치공사
계약금액	7,625,521 천원	계약일	2012.12.18	시공사	케이월드종합건설(주)외1개사
공사기간	2012.12.21 ~ 2014.05.30	낙찰율	85.496%	설계자	현대엔지니어링㈜외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜신명건설기술공사외 2개사
공사규모	○ 빗물저류조 V=15,000㎥ ○ 유입관로 L=237.45m (2.0×1.5@1) ○ 조경공사 1식			※ 작성자 : 업무담당 방재안전시설부 한종수 (☎ 3708-8772)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	저류조 쉬트파일 695 TON H파일 58 TON 유입관거 쉬트파일 309 TON H파일 220TON 토류판 1,094㎡ 터파기 4,773㎥/ 잔토처리 5,086㎥		저류조 쉬트파일 486 TON H파일 127TON PE배수로 226M 유입관거 H파일 328TON 토류판 2,642㎡ 터파기 5,303㎥/잔토처리 5,267㎥	저류조 쉬트파일 감)209TON H파일 증)69TON PE배수로 증)226M 유입관거 쉬트파일 감)309TON H파일 증)109TON 토류판 증)1,548㎡ 터파기 증)530㎥ 잔토처리 증)181㎥
공 사 비	2,909,240 천원		2,965,640 천원	증 56,400 천원
적 용 요 율	낙찰율 85.496%		낙찰율 85.496%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	저류조 토공 암발생으로 인한 가시설 공법변경, 가시설공사 침수 방지용 PE배수로 설치 및 서초대로횡단부 지장물 저촉으로 유입관로 종단구배 조정에 의한 가시설변경.
효 과	① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

- 잠원2감 2014-127호(14.04.30) 실정보고(감리단 → 도기본)

- 방재시설부- 2689호(14.05.07) 실정보고 승인통보(도기본 → 감리단)

- 잠원2감 2014-132호(14.05.08) 실정보고 승인통보(감리단 → 시공사)