【별 첨 1】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	7	요청부서		방재안전시설부			요청일	2014년 03월 일
공 사 명	용허리 빗물저류조 설치공사
공사개요	공사규모		빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
	공사기간		2012. 12. 21 ~ 2014. 05. 30
	감 리 사		㈜신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		현대엔지니어링㈜외 2개사
	시 공 사		케이월드종합건설㈜외 1개사
자문 안건명			사토운반거리 변경			요청금액			증 558,604 천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 당초 잔토운반거리가 L=15KM로 설계되어 공사구간 인근지역의 사토장을 선정코져 토사알림 이, 토석정보등을 통해 사토장 선정을 추진하였으나, 당현장 토사 반출시기와 반출토사의 토질상태 등이 사토장조건과 맞지않고, 인근지역내 사토장선정이 불가하여 부득이 수도권외곽에 사토장을 선정코져 함.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초 : 운반거리 15km - 변경 : 운반거리 43.9km ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 운반거리 15km - 변 경 : 운반거리 43.9km - 증 감 : 운반거리 28.9km					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 192,146 천원 - 변 경 : 750,750 천원 - 증 감 : 증 558,604 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 저류조/유입관거 - 토공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.						▪ 공사예정시기 : 2013년 월

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용허리공원 빗물저류조 설치공사
계약금액	7,625,521 천원	계약일	2012.12.18	시공사	케이월드종합건설(주)외1개사
공사기간	2012.12.21 ~ 2014.05.30	낙찰율	85.496%	설계자	현대엔지니어링㈜외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜신명건설기술공사외 2개사
공사규모	○ 빗물저류조 V=15,000㎥ ○ 유입관로 L=237.45m (2.0×1.5@1) ○ 조경공사 1식			※ 작성자 : 업무담당 방재안전시설부 한종수 (☎ 3708-8772)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	운반거리 (L=15km)		사토 운반거리 변경 운반거리 (L=43.9km)	운반거리 증가 (L= 28.9km)
공 사 비	192,146 천원		750,750 천원	증 558,604 천원
적 용 요 율	낙찰율 85.496%		낙찰율 85.496%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	계약예규 공사계약일반조건 제20조1항내지 2항
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	당초 잔토운반거리가 L=15KM로 설계되어 공사구간 인근지역의 사토장을 선정코져 토사알림이, 토석정보등을 통해 사토장 선정을 추진하였으나, 당현장 토사 반출시기와 반출토사의 토질상태 등이 사토장조건과 맞지않고, 인근지역내 사토장선정이 불가하여 부득이 수도권외곽에 사토장을 선정코져 함.
효 과	① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

- 잠원2감 2014-59호(14.02.13) 실정보고(감리단 → 도기본)

- 방재안전시설부-2937호(14.02.24) 실정보고 승인통보(도기본 → 감리단)

- 잠원2감 2014-074호(14.02.26) 실정보고 승인통보(감리단 → 시공사)

별 첨 1】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	8	요청부서		방재안전시설부			요청일	2014년 03월 일
공 사 명	용허리 빗물저류조 설치공사
공사개요	공사규모		빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
	공사기간		2012. 12. 21 ~ 2014. 05. 30
	감 리 사		㈜신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		현대엔지니어링㈜외 2개사
	시 공 사		케이월드종합건설㈜외 1개사
자문 안건명			강관 틀비계설치			요청금액			증 11,500천원
자문요청사유			▢ 3,000만원 이상 변경사항 ☑ 전체공사비 10%이상 증가 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 저류조 기둥부 철근 및 거푸집 조립, 콘크리트 타설을 위한 비계가 누락되어, 기둥부(0.7*0.7*7.4, 48개소) 틀비계 설치를 실정보고 함.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초 : - 변경 : 강관 틀비계 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - 변 경 : 강관 틀비계 2,252 ㎡ - 증 감 : 강관 틀비계 2,252 ㎡					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 변 경 : 11,500 천원 - 증 감 : 증 11,500 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 저류조 - 구조물
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 설계내역서 1부.						▪ 공사예정시기 : 2013년 월

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용허리공원 빗물저류조 설치공사
계약금액	7,625,521 천원	계약일	2012.12.18	시공사	케이월드종합건설(주)외1개사
공사기간	2012.12.21 ~ 2014.05.30	낙찰율	85.496%	설계자	현대엔지니어링㈜외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜신명건설기술공사외 2개사
공사규모	○ 빗물저류조 V=15,000㎥ ○ 유입관로 L=237.45m (2.0×1.5@1) ○ 조경공사 1식			※ 작성자 : 업무담당 방재안전시설부 한종수 (☎ 3708-8772)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요			강관 틀비계 ( 2,252 ㎡ )	강관 틀비계 ( 2,252 ㎡ )
공 사 비			11,500 천원	증 11,500 천원
적 용 요 율			기 계약 단가 적용	기 계약 단가 적용
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	저류조 기둥부 철근 및 거푸집 조립, 콘크리트 타설을 위한 비계가 누락되어, 기둥부(0.7*0.7*7.4, 48개소) 틀비계 설치를 실정보고 함.
효 과	① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

- 잠원2감 2014-60호(14.02.13) 실정보고(감리단 → 도기본)

- 방재안전시설부-3043호(14.02.25) 실정보고 승인통보(도기본 → 감리단)

- 잠원2감 2014-074호(14.02.26) 실정보고 승인통보(감리단 → 시공사)

별 첨 1】

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	9	요청부서		방재안전시설부				요청일	2014년 03월 일
공 사 명	용허리 빗물저류조 설치공사
공사개요	공사규모		빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
	공사기간		2012. 12. 21 ~ 2014. 05. 30
	감 리 사		㈜신명건설기술공사외 2개사
	설 계 사		현대엔지니어링㈜외 2개사
	시 공 사		케이월드종합건설㈜외 1개사
자문 안건명			지중구조물 발생			요청금액	폐기물처리비 증 22,110 천원 도급비 증 360 천원
자문요청사유			▢ 3,000만원 이상 변경사항 ☑ 전체공사비 10%이상 증가 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 저류조 본토공 터파기 시공중 당초 설계에 없는 하수관 등 지중구조물이 발견되어 폐기물 처리하고, 누락된 상차비용을 설계에 반영하고져 함.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초: 폐기물1,469ton/터파기377㎥ - 변경: 폐기물2,357ton/폐기물적재999㎥ ▪ 물량 증감내역 - 당 초: 폐기물 1,469 ton/터파기377㎥ - 변 경: 폐기물2,357ton/폐기물적재999㎥ - 증 감: 폐기물 888ton/터파기-377㎥/ 폐기물적재 999㎥					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 도급비 3,480천원/폐기물처리비 37,871천원 - 변 경 : 도급비 3,840천원/폐기물처리비 59,981천원 - 증 감 : 폐기물처리비 증 22,110 천원 도급비 증 360 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 저류조 - 토공/폐기물처리비
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.							▪ 공사예정시기 : 2013년 월

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용허리공원 빗물저류조 설치공사
계약금액	7,625,521 천원	계약일	2012.12.18	시공사	케이월드종합건설(주)외1개사
공사기간	2012.12.21 ~ 2014.05.30	낙찰율	85.496%	설계자	현대엔지니어링㈜외 2개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜신명건설기술공사외 2개사
공사규모	○ 빗물저류조 V=15,000㎥ ○ 유입관로 L=237.45m (2.0×1.5@1) ○ 조경공사 1식			※ 작성자 : 업무담당 방재안전시설부 한종수 (☎ 3708-8772)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	폐기물 1,469 ton 터파기 377 ㎥		폐기물 2,357 ton 폐기물적재 999 ㎥	폐기물 888 ton 터파기 -377 ㎥ 폐기물적재 999 ㎥
공 사 비	41,351 천원		63,821 천원	증 22,470 천원
적 용 요 율			폐기물처리비 : 기존단가적용 폐기물적재비 : 낙찰율 적용
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	저류조 본토공 터파기 시공중 당초 설계에 없는 하수관 등 지중구조물이 발견되어 폐기물 처리하고, 누락된 상차비용을 설계에 반영하고져 함.
효 과	① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

- 잠원2감 2014-61호(14.02.13) 실정보고(감리단 → 도기본)

- 방재안전시설부-3044호(14.02.25) 실정보고 승인통보(도기본 → 감리단)

- 잠원2감 2014-074호(14.02.26) 실정보고 승인통보(감리단 → 시공사)