설계변경자문위원회 심의요청서

건 명	2019년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)

요청기관명	기반시설과
요청연월일	2019년 6 월

첨부 : 공사중 설계변경 설명서 1부.

공사중 설계변경 설명서
공 사 명	2019년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)	요청기관 (사업시행부서)		기반시설과
공사위치	한강공원 전지역(보행육교, 계단, 경사로 등)
공사기간	2019. 04. 01. ~ 2019.11. 30.
용역기간	~
공사금액	(당초) 총공사비 : 305,148천원 도 급 비 : 304,068천원 이 전 비 : 1,080천원		(변경) 총공사비 : 305,148천원 도 급 비 : 304,068천원 이 전 비 : 1,080천원
보상금액	- 천원		금회 증액 보상비 : - 천원
보완설계 계약방법	해당없음		보완설계 용역비용 : - 천원
사업구분	일반공개경쟁 입찰공사
○ 공사개요 - 규 모 ‧ 진출입시설 : 데크보수 620㎡, 조류방지망 설치 200㎡, 철재면 재도장 150㎡, 오일스텐재도장 440㎡ ‧ 천상의계단 : 석재판 철거 후 재설치 138㎡, 도막식 방수 138㎡ ‧ 부 대 공 : 공사안내판 설치 등1식 - 사 업 비 : 305,148천원(도급비 304,068천원 이전비 1,080천원) - 사업기간 : 2019.04.01. ~ 2019. 11. 30. - 시 공 사 : ㈜민정토건 대표 백승언 ○ 설계변경 개요 - 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 및 물량 증·감 사항 반영
○ 첨부 서류 1. 설계변경 사유서 2. 설계변경내역서

공사중 설계변경 사유서

사업시행 부서 작성자	부서명: 기반시설과 성 명: 박지수	(☏ 3780-0676)

사업명 : 2019년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)

가. 사업개요

○ 위    치 : 한강공원 전지역(보행육교, 계단, 경사로 등)

○ 사업기간 : 2019. 04. 01. ~ 2019. 11. 30.

○ 총공사비 : 305,148천원

항 목	당 초	변 경	증 감
총공사비	305,148,000	305,148,000	증·감 없음

<사업규모>

사 업 규 모 (사업량)
당 초	변 경
◦ 진·출입시설 보수 - 데크보수 620㎡ - 오일스텐칠 440㎡ - 석재판 정비 32㎡ - 안전난간 설치 30m - 핸드레일 설치 54m	◦ 진·출입시설 보수 【수량변경】 데크보수 270㎡ 오일스텐칠 1,480㎡ 석재판 정비 168㎡ 안전난간 설치 88m 핸드레일 설치 58m 【신규공종】 방음판 설치 3개소 사다리 안전 등받이 제작설치 4개소 풀림방지너트 설치 244개 볼트캡 설치 122개 고재처리 32.4㎏
◦ 천상의 계단 보수 - 석재판 철거 후 재설치(138㎡) - 도막식 방수(2회) 138㎡	◦계단 및 승강기 설치에 따른 지장물 저촉 【수량변경】 석재판 철거 후 재설치(117.7㎡) 도막식 방수 0㎡ 【신규공정】 시멘트액체 방수 40㎡ 우렌탄 방수 117.7㎡

나. 설계변경 사유

○ 설계변경 주요내용

- 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 및 물량 증·감 사항 반영

․한강공원 진입시설 보수(증 1,284천원)

․천상의 계단 보수(증 1,448천원)

․기타 부대공(증 2,068천원)

○ 변경 사유

- 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 및 물량 증·감 등

다. 설계변경 필요성

○ 공사감독 수행 중 설계변경 사유 발생

라. 설계변경의 적법성 및 관련계획과의 연계성

마. 사업계획변경 추진에 따른 제약요인 및 재원조달 가능성

○ 사업추진 제약요인 : 없음

○ 재원 조달 가능성 : 시비 사용