제1차 설계변경자문회의(소위원회)

제 목	제1차 설계변경자문회의(소위원회)
일 시	2016. 3. 29.(화) 14:00
장 소	도시기반시설본부 토목부 회의실(청계천청사 12층)
자문위원	위원장 : 토 목 부 도시고속도로과장 명경출 간 사 : 토 목 부 시희식 위 원 : 방재시설부 김소연, 토목부 홍상필 감리단장 김평기 (신월 빗물저류 배수시설 등 방재시설 확충공사 건설공사,, *************) 감리단장 정하설 (천호대로 확장공사, *************) 감리단장 김동수 (암사대교 건설공사, *************)
자문안건 (13건)	1. 선사로~고덕지구간 도로확장공사 ---------------------- 토 목 부 ο 현장사무실 기간연장 ⇒ 증 86,350천원 2. 동부간선도로(3공구) 확장공사 ------------------------ 토 목 부 ο 지하차도 교면포장공법 변경(PCMC포장) ⇒ 증 243,640천원 ο 수락고가차도(우측) 방음벽 소음감쇠기 설치 건 ⇒ 증 112,475천원 3. 목동교 성능개선공사 ------------------------------- 토 목 부 ο 교각 코핑부보강, 가설벤트 제작 및 설치반영 ⇒ 증 633,255천원 ο 기존 슬래브 절단크기 조정 및 낙하물방지공 변경 ⇒ 증 959,590천원 ο 품질시험 및 품질관리 활동비 반영 ⇒ 증 89,650천원 4. 장안교(구교) 성능개선공사 --------------------------- 토 목 부 ο 구조물(교각) 시공에 대한 공기단축방안 ⇒ 증 113,000천원 5. 합정 외1개소 빗물펌프장 증설공사 ------------------- 방재시설부 ο 보완설계 및 공사 실정보고에 대한 내역변경 ⇒ 증 514,206천원 6. 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 ------------ 방재시설부 ο 중람물재생센터 시설현대화 방류관로 설계변경 ⇒ 증2,847,000천원 7. 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 ------------------ 방재시설부 ο 서울대정문 앞 아스콘포장 파손부위 복구 ⇒ 증 65,134천원 ο 계측관리비 추가분 반영 ⇒ 증 354,200천원 ο 복공구간 결빙에 따른 교통사고 저감 방안 ⇒ 증 106,700천원 8. 경춘철교 정비공사 ------------------------------ 방재시설부 ο 배수시설 변경 ⇒ 증 153,888천원

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 이환규	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 •도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2016. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			현장사무실 기간연장			요청금액		증 86,350천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사중 공사기간(2009.01.06.~2015.12.31.→2009.01.06.~2016.12.31.) 변경에 따른 가설사무소 기간도 연장하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 가설사무소 제경비 2중 산정(감액바람)

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 김동현	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	동부간선도로 확장공사(3공구)
공사개요	공사규모		L = 2.25㎞, B = 4~6차로
	공사기간		2008. 02. 15 ~ 2017. 12. 31
	감 리 사		동부엔지니어링(주), (주)한국건설관리공사
	설 계 사		(주)동일기술공사, (주)건화
	시 공 사		세원건설(주), 홍용종합건설(주)
자문 안건명			지하차도 교면포장공법 변경(PCMC포장)			요청금액		증 243,640천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등) 공법변경(신기술, 신공법 포함)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 동부간선도로(3공구)확장공사에 적용된 지하차도포장(가요성 아스팔트포장)을 유지관리상의 문제등을 사유로 서울시 북부도로사업소에서 강성포장으로 변경요청에 따라 여러 과정 (현장조건,경제성등)을 거쳐 최종적으로 특정제품선정위원회에 의해 결정된 강성포장(PCMC)으로 변경코져 검토한 사항임
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 콘크리트 절단 단가는 m당 단가로서 1회 절단비용×9회로 계상 재검토바람 - LMC포장단가 5㎝ → 4㎝조정(감액)

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 김동현	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	동부간선도로 확장공사(3공구)
공사개요	공사규모		L = 2.25㎞, B = 4~6차로
	공사기간		2008. 02. 15 ~ 2017. 12. 31
	감 리 사		동부엔지니어링(주), (주)한국건설관리공사
	설 계 사		(주)동일기술공사, (주)건화
	시 공 사		세원건설(주), 홍용종합건설(주)
자문 안건명			수락고가차도(우측) 방음벽 소음감쇠기 설치 건			요청금액		증 112,475천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 수락고가인근 주민(상록수APT, 은빛2단지 208, 9동)의 계속된 소음민원해결을 위해 구청장, 시의원등 수차례 현장답사 주민협의를 거쳐 복합적인 소음해결 대책으로 검토한 사항임.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 방음벽은 공장 조립제품으로 재료비, 노무비, 경비를 경비를 일괄처리

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 노순재	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	목동교 성능개선공사
공사개요	공사규모		- 기존교량 상부슬래브 철거 및 설치 L=240m, B=20.4m - 가교설치 : 1개소 (L=320m, B=28m)
	공사기간		2015. 08. 12 ~ 2017. 08. 11 (731일)
	감 리 사		(주)한국종합기술, (주)신한종합건축
	설 계 사		(주)진화기술공사, (주)천일
	시 공 사		용일토건(주)
자문 안건명			교각 코핑부보강, 가설벤트 제작및 설치 반영			요청금액		증 633,255천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			- 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 - 민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 1. 코핑부 보강철근의 절단 방지를 위한 선행하중잭 설치수량 반영 2. 가설벤트 운영시 하천점용 기간내에 공사를 완료할 수 있도록 제작·설치수량(2조->4조)증가
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 교대 콘크리트 타설수량 검토 (8ea 적용) ○ 강관 비계다리 실적공사비 적용

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 노순재	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	목동교 성능개선공사
공사개요	공사규모		- 기존교량 상부슬래브 철거 및 설치 L=240m, B=20.4m - 가교설치 : 1개소 (L=320m, B=28m)
	공사기간		2015. 08. 12 ~ 2017. 08. 11 (731일)
	감 리 사		(주)한국종합기술, (주)신한종합건축
	설 계 사		(주)진화기술공사, (주)천일
	시 공 사		용일토건(주)
자문 안건명			기존 슬래브 절단크기 조정 및 낙하물방지공 변경			요청금액		증 959,590천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			- 현장여건 상이(지질, 용수 등) - 민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 1. 절단된 슬래브(L=6.75m)를 크레인으로 인양시 장비 거치폭 및 선회각으로 인한 주변 차량충돌 및 교통흐름 방해를 예방코자 절단슬래브 크기를 L=3.37m로 변경. 2. 하천점용허가조건에 의거 낙하물에 의한 안전사고 및 절단수에 의한 하천오염을 방지하고자 공간비계 및 집수설비를 설치함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 원안가결

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 노순재	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	목동교 성능개선공사
공사개요	공사규모		- 기존교량 상부슬래브 철거 및 설치 L=240m, B=20.4m - 가교설치 : 1개소 (L=320m, B=28m)
	공사기간		2015. 08. 12 ~ 2017. 08. 11 (731일)
	감 리 사		(주)한국종합기술, (주)신한종합건축
	설 계 사		(주)진화기술공사, (주)천일
	시 공 사		용일토건(주)
자문 안건명			품질시험 및 품질관리 활동비 반영			요청금액		증 89,650천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 품질시험 계획수립 대상공사로서, “건설기술진흥법 시행규칙53조(품질관리비의 산출 및 시행규칙)에 근거하여 품질시험비 및 품질관리 활동비를 계상 반영하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 품질시험실 면적 확인바람(27㎡)

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 박웅교	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	장안교(구교) 성능개선공사
공사개요	공사규모		- 기존교량 철거(B = 17 m, L = 200 m) - 교량신설 (B = 17 m, L = 218 m : 라멘교 + Pre-Flex Beam 교) - 교통우회용 가교 : 200 m(TRIAS 공법)
	공사기간		2014. 12. 16. ~ 2016. 12. 15.
	감 리 사		㈜삼안, ㈜유신, ㈜경동엔지니어링
	설 계 사		㈜서영eng, ㈜삼보기술단
	시 공 사		새천년종합건설(주), ㈜승영기술공사
자문 안건명			구조물(교각) 시공에 대한 공기단축방안 - 교각 거푸집 및 가시설 변경			요청금액		증 113,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			- 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 - 민원해결, 보수, 보강 - 공법변경(신기술, 신공법 포함)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 중랑천 하천점용허가 지연 및 수방기간 하천공사 중지로 공기지연이 예상됨에 따라 간접비 발생 및 시민불편을 최소화하기 위해 구조물(교각) 시공에 대한 공기단축 비용 반영
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 코핑강재 거푸집 설치해체 공사비 산출내역 수직고 할증 제외 등 단가 재검토 ○ 코핑강재거푸집 설치해제시 장비조합(100톤 크레인)은 강재거푸집의 중량을 반영하여 장비 적용 ○ 가시설(띠장, 버팀보) 변경에 따른 구조에 대한 안전성 검토 ○ 가시설 설치공사 중 쉬트파일 근입깊이 5.5m를 4.0m로 변경

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호			요청부서	방재시설부 담당 박중모	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사
공사개요	공사규모	빗물펌프장 증설 2개소 (합정 160㎥/min, 중동 210㎥/min)
	공사기간	2013. 1. 4 ~ 2016. 4. 30
	감 리 사	서울특별시시설관리공단
	설 계 사	㈜삼안, ㈜도화엔지니어링
	시 공 사	(주)금강주택
자문 안건명		보완설계 및 공사 실정보고에 위한 내역변경				요청금액		증 514,206천원
자문요청사유		- 5,000만원 이상 변경사항 - 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형		- 발주기관 설계서 변경 필요 (유관기관 요청) - 민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 1. 열악한 지반구조와 노후건물 근접으로 설계대로 시공시 안전사고 및 민원발생이 우려되어 설계사 합동 기술자문회의(2회) 및 대책회의(4회)후 보완설계 반영 2. 지하철과 공사장 이격거리 약 17m로 관련규정에 따라 지하철 교량 안전진단/자동화 계측 반영 3. 하수관거 부설구간 지장상수도 이설과 펌프장 증설구간 가설방음벽 설치 반영
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 노후건물 근접으로 안전사고 등이 우려되므로, 기술자문회의 및 대책회의 등을 실시하여 의견 반영하여 원설계자 보완설계 완료(2015.12.17.) 자문회의 결과(요약) ○ 내용 : 전문가 자문회의 2회 개최후 의견수렴하여 보완 설계반영
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 가시설 CIP 수량산출 확인 ○ 토출관로 가시설 버팀대는 스크류잭 설치를 검토 ○ 상수도 이설공사 소요자재는 KC 인증제품 사용

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호		요청부서		방재시설부 담당 조양호	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 - 시설현대화 방류관로
공사개요	공사규모		- 기존시설 고도처리개량 88만톤/일 - 시설현대화 25만톤/일, 중랑천용수공급시설 20.3만톤/일 - 시설현대화 총인처리시설 25만톤/일
	공사기간		2016. 5. ~ 2016. 8
	감 리 사		㈜한국종합기술 외 1개사
	설 계 사		㈜우리엔지니어링
	시 공 사		지에스건설㈜ 외 3개사
자문 안건명			중랑물재생센터 시설현대화 방류관로 설계변경 件			요청금액		증 2,847,000천원
자문요청사유			3,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설치로 방류 계획의 수리조건 변화를 고려하여 당초 자연유하 방류계획을 우천시 방류펌프시설로 계획하고, 방류관로를 제1방류구와 통합하기 위하여 통합1,2처리장 방류BOX에 연결하고자 함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 제1방류구의 TMS를 통합관리하기 위해 통합1,2처리장 방류수와 통합방류 될 수 있도록 노선계획 변경이 적정하게 계획됨
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 어스앵커 그라우팅 1,2차 주입량 확인 ○ 구내배관 평균높이 산출시 연장과 면적수량 불일치(P.33) ○ PVC PIPE D100 수량산출 근거 없으므로 제외 (P.61) ○ 에폭시 방수→아스팔트 방수로 변경 ○ SGR공 기계기구/플랜트 설치해체 횟수 합계 확인(P.114) ○ 어스앵커 그라우팅 1차 및 2차 주입량 오류 시정 ○ 공사손해 보험료 적용 검토 ○ 철근 고재 처리비 누락 ○ 계측기 설치위치를 도면에 명기하여 현장관리

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호			요청부서	방재시설부 담당 조 동 협	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사
공사개요	공사규모	- 구조물 공사 레미콘 타설:13,754㎥ 철근가공조립:2,283ton PC설치:675 EA - 유입암거 150m - 조경공사 및 부대공 1식
	공사기간	2012. 01. 06 ~ 2017. 05. 30
	감 리 사	(주)신명건설기술공사
	설 계 사	한국종합기술 외
	시 공 사	남광토건㈜, ㈜서우건영
자문 안건명		서울대정문 앞 아스콘포장 파손부위 복구				요청금액		증 65,134천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 외부 전문가 안전점검시 가시설 배면 아스콘 파손부위를 복구조치 하도록 지시받아 파손부위 복구작업을 실시하고 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의를 요청함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 미끄럼방지포장 단가적용 재검토 ○ 프라임코팅 RSC-4→RSC-3로 표기 수정(P.46) ○ 혼합기층(동상방지층, t=40㎝)삭제 ○ 과속방지턱 아스콘(#78) 단위수량 재산정(P.55) ○ 절삭으로 발생한 폐기물 상차비 제외

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호			요청부서	방재시설부 담당 조 동 협	요청일	2016년 3월 일
공 사 명	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사
공사개요	공사규모	- 구조물 공사: 레미콘 타설:13,754㎥ 철근가공조립:2,283ton PC설치:675 EA - 유입암거 150m - 조경공사 및 부대공 1식
	공사기간	2012. 01. 06 ~ 2017. 05. 30
	감 리 사	(주)신명건설기술공사
	설 계 사	한국종합기술 외
	시 공 사	남광토건㈜, ㈜서우건영
자문 안건명		계측관리비 추가분 반영			요청금액		증 354,200천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공사기간 연장(23개월)에 따라 계측관리비 추가분 및 경사계 추가 설치건을 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의 상정함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 흙막이 가시설 장기화에 따른 안전성 검토 ○ 계측기간 연장은 협의단가가 아닌 낙찰률 적용

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호			요청부서	방재시설부 담당 조 동 협	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사
공사개요	공사규모	- 구조물 공사 레미콘 타설:13,754㎥ 철근가공조립:2,283ton PC설치:675 EA - 유입암거 150m - 조경공사 및 부대공 1식
	공사기간	2012. 01. 06 ~ 2017. 05. 30
	감 리 사	(주)신명건설기술공사
	설 계 사	한국종합기술 외
	시 공 사	남광토건㈜, ㈜서우건영
자문 안건명		복공구간 결빙에 따른 교통사고 저감 방안				요청금액		증 106,700천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 겨울철 복공구간 결빙에 의한 교통사고방지 대책 수립 실행방안을 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의 상정 함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 미끄럼방지포장 단가적용 재조정 ○ 교통관리원 배치에 대한 단가적용의 적정성 검토, 투입은 자세한 자료 필요

설계변경자문회의(소위원회) 결과(제1차)

문서번호		요청부서		방재시설부 담당 김학지	요청일		2016년 3월 일
공 사 명	경춘철교 정비공사
공사개요	공사규모		복합소재 바닥판 : 955M2, Rolled Beam : 93.626Ton, 엘리베이터 2개동
	공사기간		2015 . 01 . 06 ~2016 . 5 . 23
	감 리 사		(주)선진엔지니어링건축사사무소
	설 계 사		(주)동일기술공사
	시 공 사		대흥토건주식회사
자문 안건명			배수시설 변경			요청금액		증 153,888천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 교량의 종횡구배가 없어 교량상부의 우수가 체수 될수 있어, 이를 보완코져 난간측면에 트렌치 설치(L=354m), 하부배수관 확대(Φ100mm→Φ150mm)를 하고자함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 원활한 배수 및 구조체의 유지관리와 품질확보를 위한 강재형식의 트렌치 설치(L=354m), 배수관 규격 확대(Φ100mm→Φ150mm)
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 공사비 산출기초인 1식 단가적용은 세부적인 단가적용 근거제시 바람 ○ 세부 공종별 품셈단가 산출하여 비교 검토 ○ 그레이팅(B=80㎜)과 배수관(D=150㎜) 연결부 상세규격 적정성 검토