설계변경 자문회의 지적사항 조치결과(제15차)

□ 공사명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사                부서 : 방재시설부

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	RPP가설방음벽 변경	➁,➄	125,865천원	1,865천원	124,000천원

※ 자문요청금액은 자문회의 요청서의 안건별 증.감액임

※ 설계변경 유형

①정책, 계획 등 사업계획변 경 ②민원해결, 보수, 보강 ③문화재 및 지장물 이설

④현장여건 상이 ④유지관리, 사용부서 요구 ⑤설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑥공법변경 ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 사전협의 미흡

□ 자문결과 안건별 지적사항 조치결과

(단위 : 천원)

자문건명	지적사항	조치결과	요구액	절감액	증감사유
					주요공정	사유
RPP 가설 방음벽 변경	자재단가를 조달청 단가와 비교 검토 반영 외 3건	검토의견반영(별첨참조)	125,865	1,865	가설방음벽설치	단가 수정

※ 주요공정

- 가설방음벽 설치

□ 설계변경자문회의(소위원회)결과(제15차) 답변서

- 공사명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사

자문결과	자문결과 반영사항	비고
○ 신규단가에 대해 협의율(90.356%)을 적용하였으나 낙찰율 적용단가로 표시되어 있고, 발주처와 협의단가(협의율) 적용 근거자료가 누락되어 있으니 보완할 것(p31)	○ 낙찰율 적용단가로 표시되어 있는 부분은 오타 부분으로 설계변경시 협의율 단가(90.356%)를 적용하였으며, 근거자료로 회의록을 첨부함.	첨부 1
○ 가설방음판 손료를 공사기간(24개월)로 산정하였으나, 실사용 기간을 감안하여 재 검토후 반영할 것	○ 공사계약기간이 2013년 1월 3일 부터 2015년 12월 31일로 총36개월로 가설방음벽 설치완료 시점인 2013년 12월부터 24개월 적용 함.	-
○ 중기사용료에 대한 적산 산출근거자료가 누락되어 있으니 보완할 것(p36)	○ 중기사용료에 대한 적산 산출근거자료 첨부함.	첨부2
○ 자재조서상 자재단가는 다시한번 검토해보고, 예산절감 및 경제적인 측면에서 조달청 단가를 추가 비교검토하여 반영할 것(p38)	○ 조달청 단가를 추가 비교 검토하여 저가인 조달청 단가를 반영함.	첨부3

□ 근거자료

(협의률 결정 회의록)

(적산산출근거)

(조달청 단가 비교검토)

설계변경 자문회의 지적사항 조치결과(제15차)

□ 공사명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사                부서 : 방재시설부

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	공기연장 간접비	①,②	298,848천원	1,639천원	297,209천원
2
3
4

※ 자문요청금액은 자문회의 요청서의 안건별 증.감액임

※ 설계변경 유형

①정책, 계획 등 사업계획변 경 ②민원해결, 보수, 보강 ③문화재 및 지장물 이설

④현장여건 상이 ④유지관리, 사용부서 요구 ⑤설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑥공법변경 ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 사전협의 미흡

□ 자문결과 안건별 지적사항 조치결과

자문건명	지적사항	조치결과	요구액 (천원)	절감액 (천원)	증감사유
					주요공정	사유
공기연장간접비	고용보험료 이중 적용 재검토	검토의견반영(별첨참조)	298,848	1,639	간접노무비	고용 보험료 공제

※ 주요공정

- 간접 노무비(간접비)

□ 설계변경자문회의(소위원회)결과(제15차) 답변서

- 공사명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사

자문결과	자문결과 반영사항	결과
○ 간접노무비 산정시 임금내역서상 근로자 부담 고용보험료가 이중적용된 것으로 판단되니 재 검토후 공제 등 조정할 것 → 간접노무비 승률계상 항목인 고용보험료 이중계상	○ 간접노무비 산정시 임금 내역서상 근로자 부담 고용 보험료 공제.	수정 (#4)

□ 근거자료

(조달청 단가)