『가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)』

공사 설계변경(전체2회, 1차2회 , 2차1회) 시행 보고

□ 공 사 개 요

○ 공 사 명	:	가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사
○ 공사기간	:	(전체분)	2018년 12월 26일 ~ 2019년 12월 25일(365일)
		(1차분)	2018년 12월 26일 ~ 2019년 12월 20일(360) 공기연장 증 51일
		(2차분)	2019년 08월 20일 ~ 2019년 12월 25일(128일)
○ 공 사 비	:	(전체분)	당초 2,303,257천원 ⇒ 변경 2,309,294천원 (증 6,037천원)
		(1차분)	당초 1,594,825천원⇒변경 1,580,326천원(감 14,499천원)
		(2차분)	당초 708,431천원 ⇒ 변경 728,968천원 (증 20,536천원)
○ 시 공 사	:	주계약자⇨이화종합건설(주) / 부계약자⇨(주)신영토건

□ 설계변경 사유

⇨ 변경근거 : 가양 2019-1001호(2019.10.18.)

가양 2019-1101호,1102호

- 기 실정보고 승인 사항에 대하여 공사비 반영.

⇨ 관련방침

- 19.10.28 : 기반시설과-3519 , 포장 계획 변경 등

- 19.11.05 : 기반시설과-3653 , 계단부 판석포장 및 배수시설 설치

- 19.11.22 : 기반시설과-3917 , 쏠라LED표지판 설치

□ 전체분 공사비 증감 내용

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총공사비	2,390,232,000	2,382,746,990	-7,485,010
도급공사비	2,303,257,000	2,309,294,000	6,037,000
공급가액	2,093,870,000	2,099,358,183	5,488,183
부가가치세	209,387,000	209,935,818	548,818
관급자재비	86,975,000	64,812,990	-22,162,010
폐기물처리비		8,640,000	8,640,000

□ 제1차 2회 설계변경 주요 변경내용

(단위 : 천원)

구 분		실 정 보 고			제 1 차 2 회 설 계 변 경			증·감
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
가양대교 남단 (1차분)	아스팔트절삭 및 포장		750	750		750	750	750
	점자블럭시공		120	120		120	120	120
	자전거경사로 설치		10,720	10,720		10,720	10,720	10,720
	난간설치		4,873	4,873		4,873	4,873	4,873
	반사경 설치		339	339		339	339	339
	LED표지병 설치		742	742		742	742	742
	차선도색		1,985	1,985		1,985	1,985	1,985
	화강석 판석 포장		7,649	7,649		7,649	7,649	7,649
	미끄럼방지포장		8,924	8,924		8,924	8,924	8,924
	교통안전 신호수				19,091	14,055	5,036	5,036
	보행안전도우미				59,734	39,823	19,911	19,911
	쏠라LED표지판		9,391	9,391		9,391	9,391	9,391
직접공사비					1,019,145	1,064,460	-45,315	-45,315
재경비					575,680	515,866	-59,814	-59,814
도급금액					1,594,825	1,580,326	-14,499	-24,745
관급자재비					86,975	64,813	-22,162	-22,162
폐기물처리비						8,640	8,640	8,640
총공사비					1,681,800	1,653,778	-28,021	-28,021

※ 관급자재비 감액사유 : 성수대교 남단 , 천호대교 북단 공사 중지로 인한 레미콘 , 철근,

화강석 , 탄성포장 감액

□ 제2차 1회 설계변경 주요 변경내용

(단위 : 천원)

구 분		실 정 보 고			제 2 차 1 회 설 계 변 경			증·감
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
올림픽대교 남단 (2차분)	경계블럭 설치	1,030	2,693	1,663	1,030	2,693	1,663	1,663
	점자블럭 설치	1,881	370	1,511	1,881	370	1,511	1,511
	인조화강블럭 설치		18,751	18,751		18,751	18,751	18,751
	난간설치		7,522	7,522		7,522	7,522	7,522
	반사경 설치		339	339		339	339	339
	LED표지병 설치		742	742		742	742	742
	차선도색		2,162	2,162		2,162	2,162	3,317
	차선제거		493	493		493	493	493
	원형수로관 설치		1,125	1,125		1,125	1,125	1,125
	교량배수관 설치		4,287	4,287		4,287	4,287	4,287
	미끄럼방지포장		5,991	5,991		5,991	5,991	5,991
	배수시설		2,253	2,253		2,253	2,253	2,253
	쏠라LED표지판		9,391	9,391		9,391	9,391	9,391
직접공사비					469,032	493,063	24,030	24,030
재경비					239,399	235,905	-3,494	-3,494
도급금액					708,431	728,968	20,536	20,536
관급자재비
폐기물처리비
총공사비					708,431	728,968	20,536	20,536

□ 설계변경 내용

○ 가양대교 남단 자전거도로 아스팔트 포장.

: 증 1,050 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3519호, 2019.10.28)

- 사 유 : 승강기 진출입시 자전거도로 쪽 배수불량으로 평삭 및 재포장 필요함.

- 수량변경

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
아스팔트 평삭 및 포장	a		0.6	0.6

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비	-	750	750
제 경 비	-	300	300
도급공사비		1,050	1,050

○ 교통안전 시설물 설치 (가양대교 남단) : 증 16,787 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3519호, 2019.10.28)

- 사 유 : 승강기 진출입시 교통안전시설물을 설치하여 보행자 및 자전거 충돌을

방지하여 안전사고를 방지하기 위함.

- 변경수량

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
반사경 설치	개소		1	1
LED표지병 설치	개소		8	8
차선도색	m2		67.2	67.2
미끄럼방지 포장	m2		212.4	212.4

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비		11,991	11,991
제 경 비		4,796	4,796
도급공사비		16,787	16,787

○ 자전거도로 경계부 난간설치 (가양대교 남단): 증 6,822 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3519호, 2019.10.28)

- 사 유 : 보행자의 안전을 위하여 승강기 주변과 자전거도로 경계부 난간설치

필요함.

- 변경수량

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
난간 설치	m		23	23

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비		4,873	4,873
제 경 비		1,949	1,949
도급공사비		6,822	6,822

○ 자전거 경사로 설치 (가양대교 남단) : 증 13,936 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3519호, 2019.10.28)

- 사 유 : 현장주변 민원인 가양나들목 계단 자전거경사로 설치요구.

- 변경수량

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
자전거경사로 설치	m		41	41

- 공사비 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비		10,720	10,720
제 경 비		3,216	3,216
도급공사비		13,936	13,936

○ 비상계단 판석마감 (가양대교 남단) : 증 3,574 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3653호, 2019.11.05)

- 사 유 : 계단마감이 당초 탄성고무칩으로 설계되어 있으나 빗물이 스며들어

강재의 녹발생이 우려됨으로 화강석 판석으로 변경.

- 변경수량

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
탄성포장	m2	82		-82
화강석 판석 포장(계단)	m2		82	82

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비	-	7,649	7,649
제 경 비	-	3,059	3,059
도급공사비	-	10,708	10,708
관급자설치	7,134		-7,134

○  신호수 및 보행안전도우미 정산 (가양대교,올림픽대교): 감 29,937 천원

(금회 설계변경에 반영)

- 사 유 : 신호수 및 보행안전도우미 실정산

- 변경수량

구 분	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
신호수	인	163	120	-43
보행안전도우미	인	510	340	-170

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비	78,825	53,878	-24,947
제 경 비	15,765	10,775	-4,990
도급공사비	94,590	64,653	-29,937

○ 포장계획 변경 (올림픽대교 남단) : 증 28,082 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3519호, 2019.10.28)

- 사 유 : 설계도면 검토결과 포장계획(면적,재료,공종 등)이 다수 변경됨.

- 수량변경

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
고압블럭	m2	64	0.6	-64
경계블럭	M	53	138.5	85.5
점자,유도블럭	m2	64	12.6	-51.4
인조화강블럭	m2		683.8	683.8
원형수로관 설치	M		12	12

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비	4,608	24,667	20,059
제 경 비	1,843	9,866	8,023
도급공사비	6,451	34,533	28,082

○ 교통안전 시설물 설치 (올림픽대교 남단) : 증 14,182 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3519호, 2019.10.28)

- 사 유 : 승강기 진출입시 교통안전시설물을 설치하여 보행자 및 자전거 충돌을

방지하여 안전사고를 방지하기 위함.

- 변경수량

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
반사경 설치	개소		1	1
LED표지병 설치	개소		8	8
차선도색	m2		84.2	84.2
차선제거	m2		14.4	14.4
미끄럼방지 포장	m2		142.6	142.6

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비		10,130	10,130
제 경 비		4,052	4,052
도급공사비		14,182	14,182

○ 자전거도로 경계부 난간설치 (올림픽대교 남단): 증 10,530 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3519호, 2019.10.28)

- 사 유 : 보행자의 안전을 위하여 승강기 주변과 자전거도로 경계부 난간설치

필요함.

- 변경수량

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
난간 설치	m		35.5	35.5

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비		7,522	7,522
제 경 비		3,008	3,008
도급공사비		10,530	10,530

○ 배수홈통 설치 (올림픽대교 남단): 증 4,323 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3519호, 2019.10.28)

- 사 유 : 비상계단 상부 올림픽대교 노면 배수를 위한 배수관이 슬레브 하면에

위치하고 있어, 우천시 낙수발생으로 시민의 안전이 우려됨으로 배수관

우회 연장 필요.

- 변경수량

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
배수홈통설치	m		45	45

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비		3,088	3,088
제 경 비		1,235	1,235
도급공사비		4,323	4,323

○ 승강기 배수시설 설치 (올림픽대교 남단): 증 3,154 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3653호, 2019.11.05)

- 사 유 : 승강기 내부 배수시설이 설계내역에 누락이 되어있어 금회 반영.

- 변경수량

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
배수시설	대		2	2

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비		2,253	2,253
제 경 비		901	901
도급공사비		3,154	3,154

○ 쏠라LED표지판 설치 (가양대교 남단,올림픽대교 남단): 증 3,154 천원

(실정보고 승인 기반시설과-3917호, 2019.11.26)

- 사 유 : 자전거와 보행자의 충돌방지를 위한 안전시설물 설치 반영.

- 변경수량

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
쏠라LED표지판 설치	개소		4	4

- 공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비		14,007	14,007
제 경 비		4,775	4,775
도급공사비		18,782	18,782

□ 계약 금액 변경 (1차분 , 2차분)

(단위 : 천원)

구 분	1차분 2회			2차분 1회			총공사비
	당초	변경	증.감	당초	변경	증,감
직접공사비	1,019,145	1,064,460	45,315	469,032	493,063	24,030	1,557,523
제 경 비	430,696	372,200	58,496	174,997	169,635	5,362	541,835
공 급 가 액	1,449,841	1,436,660	13,181	644,029	662,698	18,669	2,099,358
부가가치세	144,984	143,666	1,318	64,402	66,269	1,866	209,935
도급공사비	1,594,825	1,580,326	14,499	708,431	728,968	20,536	2,309,294
관급자재비	86,975	64,813	22,162				64,813
폐기물처리비		8,640	8,640				8,640
총공사비	1,681,800	1,653,779	28,021	708,431	728,968	20,536	2,382,747

□ 검 토 결 과

상기 사항에 대하여  적정성 검토 결과 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사    의 1차분 2회 , 2차분1회 설계 변경 수량 및 금액은 적정함.