설계변경 검토의뢰서

■ 사업 현황

○ 계약현황

- 계약  건명 : 2014년 정수시설물 청소 및 준설 용역

- 계약상대자 : ㈜와이씨산업개발  대표 박 남 재

- 계약  기간 : 2014. 3. 19 ~ 2014. 12. 31

- 계약  금액 : 65,118,537원

■ 설계변경 사항

○ 변경내용

- 여과사 보사에 따른 물량 변동

○ 변경물량

공 종	규 격	단위	수 량		증감물량	예산증감	비 고 (변경사유)
			당 초	변 경
정수지 벽체물청소		㎡	15,303	15,303	-	-	-
정수지 벽체세제청소		㎡	11,520	11,520	-	-	-
침전지 벽체청소		㎡	55,472	48,918	감) 6,554	감)2,523,290	-
경사판청소		㎥	4,338	4,338	-	-	-
이토제거		㎥	2,068	2,068	-	-	-
토사절취		㎥	37	37	-	-	-
2지 회수조 준설	60톤	㎥	118	118	-	-	-
베니지 및 1지 회수조준설	30톤	㎥	266	266	-	-	-
상등수 이송펌프 설치 및 철거		개소	24	24	-	-	-
상등수 이송펌프 운전		개소	24	24	-	-	-
여과사 운반		㎥	10	65	증) 55	증) 498,355
여고사 여과지내 투입	샌드 펌프	㎥	10	-	감) 10	감) 20,690
펌프 설치 및 해체		개소	1	-	감) 1	감) 219,759
여과사 투입 고르기		㎥	10	65	증) 55	증)2,270,180
계						증) 4,796

■ 도급비 변경사항

당초	변경	증감	사유
65,118,537원	65,118,537원	-	물량변동

■ 설계변경 심의내용

○ 물량 변동에 따른 설계변경 적정 반영여부

첨 부 : 1. 설계변경내역서  1부.  끝.