문서번호	치수과-18346
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

지방시설주사		하천관리팀장		치수과장		안전건설교통국장
협조

★ ◉

중랑천 횡단연결로 설치 기본 및 실시설계 용역

설계변경 검토 보고

성   동   구

(치 수 과)

중랑천 횡단연결로 설치 기본 및 실시설계 용역

설계변경 검토 보고

우리 구에서 시행중에 있는 『중랑천 횡단연결로 설치 기본 및 실시설계 용역』 에 대한 설계변경 검토 보고 임.

Ⅰ		용역현황

○ 사 업 명: 중랑천 횡단연결로 설치 기본 및 실시설계 용역

○ 사업기간: 2016. 3. 7. ~ 2016. 11. 12.

○ 사업개요: 교량설치 폭 6.0m, 연장 120.0m

○ 계 약 자: 대한민국상이군경회  대표 김덕남

○ 도급금액: 120,681,000원(시비)

Ⅱ		설계변경 사유

○ 위치이동에 따른 지반조사비 추가 및 사업규모 축소에 따른 설계비 감액

- 보오링 2개소 추가 및 지반조사비 실정산  : 증)10,798천원

- 사업규모 축소(당초: L=120m→변경: L=96.9m)에 따른 설계비 정산

감)7,798천원

※근거 : 주민설명회 개최결과 보고【치수과-7435(2016. 5. 18.)】

○ 자문회의비 정산(당초 3회 → 변경 1회) : 감)1,218천원

○ 조감도 미반영 : 감)2,017천원

Ⅲ		변경내역

○ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비		126,681,000	120,410,000	감6,271,000
도급비	공급가액	109,710,000	109,463,636	감246,364
	부가가치세	10,971,000	10,946,364	감24,636
	계	120,681,000	120,410,000	감271,000
이전비		6,000,000	0	감6,000,000

붙임 : 변경설계서 1부.