문서번호	시설관리과-19634
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
협 조

『2015년 방화1동 외 19개동 상수도공사』

설계변경 계획(1회)

2015. 9.

시설관리과

『2015년 방화1동 외 19개동 상수도공사』

설계변경 계획(1회)

강서구 관내 「2015년 방화1동 외 19개동 상수도공사」와 관련하여

신공종 및 물량 증·감이 발생하여 설계변경코자 함.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 방화1동 외 19개동 상수도공사-단가계약

나. 공사개요 : D=15~300㎜, L=1,448m

다. 계 약 일 : 2015. 05. 29.

라. 착 공 일 : 2015. 06. 01.

마. 준공기한 : 2016. 06. 30.

바. 계약금액 : *************

********* *********************

******************************

사. 도 급 자 : 천마산포장(주)  대표 안 태 정(현장대리인 : 신진호)

자. 감 리 자 : ㈜이준엔지니어링 이방열(관리기술자: 김동건)

2. 보고내용

가. 설계변경사유

- 신규공종 발생 따른 설계변경 시행(14건)

▶ 신규공종 : 철개철거공 외 8개 공종(낙찰율 적용)

▶ 사급자재 : 붓싱 40/30mm 외 4종

- 기타 물량 증ㆍ감에 따른 변경(52건)

▶ 물량 증가(29개) : 방진덮개 설치 외 28개 공종

▶ 물량 감소(24개) : 벽체계량기 설치공 외 23개 공종

※ 시방서 및 특별시방서：변경사항 없음

나. 주요공종 물량변경 내역

공 종	규 격	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감
터파기 (기계100%)불량	굴삭기(타이어)0.18	㎥	422	195	감)227
파쇄물기계상차(집하장)	유압식백호우 0.7	㎥	360	332	감)28
콘크리트 포장절단	100~150mm (야간,지세)	m	44	10	감)34
벽체계량기설치공	15㎜	개소	2027	1173	감)254
보호통 설치공	20-30mm,지세	개소	72	150	증)78
방진덮개 설치	폭 1.8m	m	79	400	증)321

3. 설계변경 내역 - 금액변동없음

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	비 고 (증 ․ 감)
총공사비	1,120,791,120	1,120,791,120	변동없음
도 급 비	650,791,120	650,791,120
관급자재비	170,000,000	170,000,000
도로복구비 및 기타	300,000,000	300,000,000

4. 조치계획

- 사업소 자체 심의후 신공종 및 물량 증ㆍ감에 따른 설계변경 시행.

첨부 : 설계변경내역서 1부.  끝.