설계변경 내용

□ 개최사유 : 공법변경을 위한 기술자문위원회 의결사항 반영에 의한

총공사비 5억이상~20억미만 공사

□ 심의내용 : 5천만원이상 증액 및 주요변경사항 심의

① 바닥자재 공법변경에 따른 신규공종 발생 및 물량증감 적정성

② 관급자재를 도급자재로 변경 적정성

③ 기타 설계변경 적정성

□ 설계변경 세부내용

1. 바닥자재(폴리우레아) 관급을 도급으로 변경

- 관급 및 사급자재 사용 자재가격 비교 검토(폴리 우레아)

구 분	기준단가(㎡)	예상적용가격	총 액	비 고
관급	25,225원	22,134	113,435천원	입찰시 낙찰하한률 87.745% 적용
사급		21,881	112,131천원	공사낙찰률 86.747% 적용
차액	사급적용 시	▼253	▼1,304천원	총면적 : 5,125㎡

※ 공사자재(폴리 우레아) 구매 비교검토(KS, KC인증을 득한 5개 업체 가격비교 검토하여 최저가제품(코00) 기준적용)

- 도막식자재(폴리 우레아) 기초금액 ; 129,278천원(25,225*5,125㎡)

▶공개경쟁 : 낙찰하한률 87.745% 적용 시 113,435천원

▶도급 : 본 공사낙찰률 86.747% 적용 시 112,131천원

○ 사 유 :

- 입찰 절차에 소요되는 일정감축으로 공기 단축

- 효율적인 품질 및 자재관리

- 예산이 절감(1,286천원)되며, 품질관리 용이

2. 바닥자재 공법변경(부착식→도막식)으로 공종물량 증・감 발생

○ 바닥표면보수 추가공종 발생

○ 바닥표면보수를 위한 표면처리(바닥) 그라인딩 추가발생

○ 유해가스 배출 및 건조를 위한 임시환기시설 각1개소 추가설치

○ 바닥표면보수(도막) 면적추가 : 유출부 홉퍼 104㎡)

○ 시공물량 증・감 현황

공 종	규 격	단위	구 분	수 량	금 액	증․ 감
ECO-PANEL방수방식(바닥)	부착식	㎡	당 초	5,021	59,252,821	감) 59,252,821
			변 경	-	-
바닥표면 보수(도막)	T=2mm	㎡	당 초	-		증) 49,876,500
			변 경	5,125	49,876,500
표면처리(바닥 추가)	그라인딩	㎡	당 초	5,478	14,533,134	증) 9,810,794
			변 경	9,176	24,343,928
임시환기시설 설치		개소	당 초	4	897,936	증) 448,968
			변 경	6	1,346,904
사급자재비(도막식)		1식	당 초	-
			변 경	1식	112,131,760	증)112,131,760
				소 계	74,683,891
					187,699,092	증)113,015,201

○ 공사비 변경 내용(총괄)

구 분	1차수 금액		2차수 금액		총 금액		증, 감
	당초 금액	변경 금액	당초 금액	변경 금액	당초 금액	변경 금액
도 급 비	415,918,200	475,101,000	492,250,000	557,700,000	908,168,200	1,032,801,000	증) 124,632,800
관 급 비	505,690,000	196,900,000	554,043,000	213,989,870	1,059,733,000	410,889,870	감)648,843,130
총공사비	921,608,200	672,001,000	1,046,293,000	771,689,870	1,967,901,200	1,443,690,870	감) 524,210,330