보 고 서
			담당	팀장	공사감독1처장
					12/01
문서번호	공사감독1처-12787
보존기간	5년		협 조	주임
결재일자	2014.12.01.			과장
공개여부	공개
제 목	설계변경 보고(제5회)

Ⅰ		공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2014년 관내포장도로 불량맨홀 정비공사

나. 공사기간 : 2014.3.20 ~ 2015.2.28

다. 도 급 액 : 741백만원

라. 공사개요 : 불량맨홀 정비 주간 423개소, 야간 420개소

마. 시공회사 : 태평림건설㈜ 대표 이동균

바. 발 주 청 : 동부도로사업소(도로보수과)

Ⅱ		설계변경 현황

가. 설계변경 사유 : 발주처 포장분야 집행잔액 활용계획 통보에

따른 설계변경 업무지시

나. 변경내용

◎ 포장분야 집행잔액 활용계획에 따른 업무지시

- 관련(추진)근거 : 도로보수과-6866(2014.11.25)

- 내 용 : 추가 배정예산 활용에 따른 설계변경

(단위 : 원)

배정액(계)	기배정액	추가배정액	비 고
800,000,000	750,000,000	50,000,000	폐기물처리비 포함 예산임

Ⅲ		공사비 변경 현황

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	비 고(증·감)
총 공사비		750,000,000	800,000,000	증) 50,000,000
도급비	공급가액	674,223,637	719,208,182	증) 44,984,545
	부가가치세	67,422,363	71,920,818	증) 4,498,455
	계	741,646,000	791,129,000	증) 49,483,000
폐기물 처리비		8,354,000	8,871,000	증) 517,000

Ⅳ		행 정 사 항

- 상기 설계 변경 사항을 발주청에 제출하고자 함.

붙 임 : 설계변경 관련서류 각 1부. 끝.