설계변경 본부위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

방재시설부

담당 조양호

요청일

2015년 03 월   일

공 사 명

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

공사개요

공사규모

- 고도처리개량 115만톤/일

- 시설현대화 36만톤/일

- 시설현대화 총인처리시설 36만톤/일

공사기간

2009. 11. 09 ~ 2015. 08. 09

감 리 사

㈜도화엔지니어링 외 1개사

설 계 사

㈜한국종합기술 외 2개사

시 공 사

대림산업㈜ 외 5개사

자문 안건명

서남물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설계변경 件

요청금액

49,746,700 천원

자문요청사유

☑ 10억 원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 제도, 기준변경

설계변경사항(요약)

○ 내용 : 공공하수처리시설 총인(T-P)항목에 대한 방류수질기준이 2012년 1월 1일부터 강화(2㎎/ℓ이하 → 0.5㎎/ℓ이하)됨에 따라 서남물재생센터에서 배출되는 처리수가 강화되는 방류수 수질기준을 준수하기 위하여 당초 서남물재생센터 시설현대화(Q=360,000㎥/일) 여과기(MDF)를 화학적 응집교반과 섬유사여과기(YDF)로 변경

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 기존설계와의 연계성이 우수한 시설배치, 대규모처리시설에 대한 적용실적이 많은 처리공법 선정에 따른 처리효율 향상기대 등 종합적인 검토결과 적정하게 계획됨

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 시설면적 : 2,071㎡ → 3,848㎡(증 4,245㎡)

- 여과시설 → 응집교반 및 섬유여과시설

- 약품저장 및 주입시설 신설

▪ 물량 증감내역

구 분	내 용
토목	- 철 근 : 당초 8,514ton → 변경 10,230ton, 증 1,717 - 레미콘 : 당초 47,894㎥ → 변경 54,701㎥, 증 6,807 - PHC파일 : 당초 5,487본 →변경 5,717본, 증 230 - 시트파일 : 당초 1,845본 →변경 2,030본, 증 185

▪ 공사비 증감내역                     (단위 : 천원)

구 분	당초	변경	증·감
토목	35,068,700	49,746,700	14,678,000

▪ 설계변경 주요 공종

구 분	내 용
토목	- 토공, 구조물공, 가시설공, 기타 부대공

별첨서류

1. 변경전후 도면 사본 1부.

2. 감리단 검토보고서 사본 1부.

3. 원설계자 검토의견 사본 1부.

4. 신규공종 단가결정 근거 1부.

5. 설계내역서 1부. 등

▪ 공사예정시기

- 2015. 4월

▪ 소요 관급자재

- 관급자재 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
계약금액	277,833,000천원	계약일	2009. 11. 09.	시공사	대림산업㈜ 외 5개사
공사기간	2009. 11. 09 ~ 2015. 08. 09	투찰율	64.9%	설계자	㈜한국종합기술 외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키(●), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜도화엔지니어링 외 1개사
공사규모	• 시설현대화 36만톤 • 고도처리개량 115만톤

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	• 토목 - 3차처리시설 36만톤/일 (MDF 18대) - PHC파일 : 5,487본 - 가시설 : 1,845본		• 토목 - 응집교반시설 (급속혼화조 8지, 완속혼화조 8지) - 총인처리시설 36만톤/일 (YDF 22대) - PHC파일 : 5,717본 - 가 시 설 : 2,030본 - 역세척수 이송관로 : 943m	• 토목 - 3차처리시설 : 삭제 - 응집교반 및 총인처리시설 등 신설 - PHC파일 및 가시설 증가 - 역세척수 이송관로 신설
공 사 비	- 토 목 : 35,068,700 천원		- 토 목 : 49,746,700 천원	- 토 목 : 14,678,000 천원
적 용 요 율	-		• 적용요율 : 없음 - 공사계약 일반조건 제21조 제3항(감소, 증가, 신규) 규정 적용 (입찰안내서 기준)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	• 서남 시설현대화 총인처리시설 설계변경 단가산정기준 (방재시설부-10793호, ’14.10.27) - 공사계약 일반조건 제21조 제3항(감소, 증가, 신규) 규정 중 증가된 물량(입찰안내서)
설계변경 근거	방 침	물재생센터 총인처리시설 설치계획(행정2부시장 방침 제183호,‘13.05.28) 총인처리시설 설계지시(설비부-6556호), 실정보고 승인(방재시설부-612호)
	관련규정	공사계약일반조건 제21조 제2항,제4항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 법적방류수질강화(T-P : 2.0mg/L → 0.5mg/L)에 따라 보증수질 준수를 위해 3차처리 공정인 “기계식 여과”를 “화학적 응집교반 + 기계식여과의 총인처리시설”로 변경함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 ☑ 미이행(턴키공사로 대상이 아닌 것으로 기술심사담당관 협의 및 확인)

□ 관련문서

· 물재생센터 총인처리시설 설치계획 (행정2부시장 방침 제183호, 물재생시설과 - 6942호, ‘13. 5.28)

· 총인처리시설 설계변경 시행 (설비부 – 6556호, ‘13. 6.18)

· 서남 시설현대화 총인처리시설 단가산정기준 승인(방재시설부-10793호, 2014.10.27)

· 서남 시설현대화 총인처리시설 설계변경 실정보고 승인 (방재시설부-612호, 2015.01.15.)

· 각 분야별 소위원회 개최(2015.01.22. ∼2015.02.10.)