설계변경(최종) 사유서

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)

나. 공사개요 : 밸브설치및보수 159개소, 소화전설치및보수174개소, 제수변정비등58개소

다. 계약기간 : 2014.06.02 ~ 2015.05.31

라. 도 급 자 : ㈜연단토건  대표 이정수

마. 발 주 자 : 북부수도사업소

바. 계약금액

- 당초 : 금417,907,590원

- 변경 : 금415,789,000원 (감 2,118,590원)

2. 보고내용

가. 신규공종 및 물량 증 ․ 감에 따른 설계변경

○ 주요 물량증가 : 소화전설치 및 보수 외 3개공종

○ 주요 물량감소 : 소화전설치 및 보수

나. 주요변경물량 현황

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	소화전 설치 및 보수	174	141	감) 33
	제수변 정비	58	105	증) 47
	변실보수	192	247	증) 55
	중형변실설치공(80~500mm)	52	65	증) 13

* 세부내용 : 내역서 참조

3. 처리의견

○ 상기 공종 수량변경에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 처리하고자 합니다. 끝.