설계변경(3회) 사유서

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)

나. 공사개요 : 밸브설치및보수 192개소, 소화전설치및보수174개소, 제수변정비등58개소

다. 계약기간 : 2014.06.02 ~ 2015.05.31

라. 도 급 자 : (주)연단토건 대표 이정수

마. 계약금액

- 당초 : 금417,907,590원

- 변경 : 금417,907,590원 (변동없음)

2. 보고내용

가. 신규공종 및 물량 증 ․ 감에 따른 설계변경

○ 주요 물량증가 : 소화전신설(지하식)외 1개 공종

○ 주요 물량감소 : 이탈방지압륜 접합외 1개 공종

나. 주요변경물량 현황

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	소화전 신설(지하식)	40	36	감) 4
	K.P 이탈방지압륜 접합(400mm)	5	16	증) 11
	구형변실설치공(400mm)	1	2	증) 1
	중형변실설치공(80~500mm)	54	52	감) 2

* 세부내용 : 내역서 참조

3. 처리의견

○ 상기 공종 수량변경에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 처리하고자 합니다. 끝.