설 계 변 경 사 유 서

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 정릉로6가길 44 주변 등 2개소 원형관로 보수공사(굴착)

○ 공사기간 : 2017.06.12. ~ 2017.12.31.

○ 도 급 자 : 거승건설(주) 대표 한영주

□ 설계변경 사유

○ 신규 공정 및 물량 증감에 다른 설계 변경

당  초  →  변  경

아스팔트포장(T=12.5cm)	:	20.5a	→	34.9a	증
- 하수관개량(D450~1000mm)	:	L=842m	→	L=612m	감
맨홀(1~3호) 설치	:	N=33개소	→	N=23개소	감
빗물받이(2호) 설치	:	N=4개소	→	N=63개소	증

□ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감		비 고
합 계	626,068,290	700,000,000	증	73,931,710
도급비	414,512,290	448,800,000	증	34,287,710
관급비	121,000,000	148,642,010	증	27,642,010
이전비	46,804,000	24,523,990	감	-22,280,010
폐기물처리비	43,752,000	78,034,000	증	34,282,000

2017.  12.

치수과장  송 기 민 (인)

성북구(분임)재무관  귀하