설계변경사유서(1회)

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)-북부

나. 공사개요 : 화강석포장 보수 300㎡, 줄눈보수 150㎡ 등

다. 공 사 비 : 275,944,780원

- 도급비 181,944,780원, 관급비 44,000,000원, 이전비 50,000,000원

라. 공사기간 : 2014. 05. 15 ~ 2015. 2. 28

마. 도 급 자 : ㈜사림엔지니어링 대표 이영걸

2. 설계변경 사유

가. 발주 당시 추정물량 대비 해빙기 이후 보수물량 증가

- 당초 포장보수 300㎡, 변경 400㎡

나. 관급자재(화강석 판석) 구매 소요기간(2~3주)을 감안 보수용 자재 사전 확보

- 당초 330㎡, 변경 530㎡

다. 화강석포장 보수 시 실측결과 두께 반영(사림1406-6,‘14.6.7)

- 당초 t=150㎜, 변경 t=160㎜

라. 철거자재 재활용비 반영(도로보수과-4748, ‘14.6.1)

마. 공사구간 내 이음몰탈 유출로 인한 분진 등 청소비 반영

바. 기타 공종별 정비물량 조정에 따른 물량 변경

사. 추가 소요공사비는 낙찰차액 사용

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액		증․감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		275,944,780	300,000,000	증)24,055,220
도급비	공급가액	165,404,346	205,000,000	증)39,595,654
	부 가 세	16,540,434	20,500,000	증)3,959,566
	계	181,944,780	225,500,000	증)43,555,220
관 급 비		44,000,000	64,500,000	증)20,500,000
이 전 비		50,000,000	10,000,000	감)40,000,000

4. 조치계획

○ 상기와 같이 설계변경(1회) 시행코자 합니다.