설계변경사유서(1회)

1. 용역현황

가. 용 역 명 : 2014년 긴급복구 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)-북부

나. 용역개요 : 폐아스콘 운반 및 처리 7,000톤

다. 용 역 비 : 40,602,000원

라. 용역기간 : 2014. 04. 16 ~ 2015. 2. 28

마. 도 급 자 : ㈜씨.에스 대표 최상준

2. 설계변경 사유

○‘14년 하반기 예산 추가 재배정 관련 정비물량 증가로 인한 폐아스콘 증량 및 신규공종 추가

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	설계변경 금액		증․감	비 고
	당 초	변 경
총용역비	40,602,000	78,810,000	증)38,208,000
공급가액	36,910,909	71,645,455	증)34,734,546
부 가 세	3,691,091	7,164,545	증)3,473,454

4. 조치계획

○ 상기와 같이 설계변경(1회) 시행코자 합니다.