설계변경사유서(1회)

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2015년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)북부

나. 공사개요 : 소규모 포장복구 34a, 절삭 덧씌우기 252a, 출동・150개소

다. 공 사 비 : 1,462,092,000원

- 도급비 639,068,000원, 관급비 511,024,000원, 이전비 312,000,000원

라. 공사기간 : 2015. 04. 03 ~ 2015. 12. 31.

마. 도 급 자 : 에이치에프건설(주) 대표 황 행 묵

2. 설계변경 사유

○ 포장 불량구간 정비에 따른 공종별 정비물량 조정

┌당 초 : 소규모 포장복구 34a, 절삭 덧씌우기 252a, 출동 150개소

└변 경 : 소규모 포장복구 34a, 절삭 덧씌우기 287a, 출동 150개소

○ 주요 변경 내용

구 분	규격	단위	당초	변경	증․감	비고
절삭후덧씌우기	야간,t=5cm	a	34	236	증 202
절삭후덧씌우기	야간,t=10cm	a	192	44	감 148
절삭후덧씌우기	야간,t=12.5cm	a	10	1	감 9
절삭후덧씌우기	야간,t=20cm	a	16	6	감 10
포장장비 수송	포장장비 이동	회	9	30	증 21

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액		증․감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		1,462,092,000	1,462,092,000	-
도급비	공급가액	580,970,910	828,243,640	증)247,272,730
	부 가 세	58,097,090	82,824,360	증)24,727,270
	계	639,068,000	911,068,000	증)272,000,000
관 급 비		511,024,000	511,024,000	-
이 전 비		312,000,000	40,000,000	감)272,000,000

4. 조치계획

○ 상기와 같이 설계변경(1회) 시행코자 합니다.