설계변경사유서(2회)

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2015년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)북부

나. 공사개요 : 소규모 포장복구 34a, 절삭 덧씌우기 287a, 출동・150개소

다. 공 사 비 : 1,462,092,000원

- 도급비 911,068,000원, 관급비 511,024,000원, 이전비 40,000,000원

라. 공사기간 : 2015. 04. 03 ~ 2015. 12. 31.

마. 도 급 자 : 에이치에프건설(주) 대표 황 행 묵

2. 설계변경 사유

○ 포장 불량구간 정비에 따른 공종별 정비물량 조정

┌당 초 : 소규모 포장복구 34a, 절삭 덧씌우기 287a, 출동 150개소

└변 경 : 소규모 포장복구 88a, 절삭 덧씌우기 319a, 출동 23hr

○ 주요 변경 내용

구 분	규격	단위	당초	변경	증․감	비고
절삭후덧씌우기	야간,t=5cm	a	236	283	증 47
절삭후덧씌우기	야간,t=10cm	a	44	36	감 8
소규모포장복구	야간,5~20cm	a	34	88	증 54
절삭후덧씌우기	야간,t=20cm	a	7	3	감 4
포장장비 수송	포장장비 이동	회	30	37	증 7
긴급소파보수(출동)	주간 및 야간	hr	0	23	증 23

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액		증․감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		1,462,092,000	1,700,000,000	증)237,908,000
도급비	공급가액	828,243,640	1,242,700,000	증)414,456,360
	부 가 세	82,824,360	124,270,000	증) 41,445,640
	계	911,068,000	1,366,970,000	증)455,902,000
관 급 비		511,024,000	333,030,000	감)177,994,000
이 전 비		40,000,000	-	감) 40,000,000

4. 조치계획

○ 상기와 같이 설계변경(2회) 시행코자 합니다.