설 계 변 경 사 유 서
○ 공 사 명 : 2015년 홍제천 및 지천관로 보수공사
○ 공사기간 : 2015. 6. 12. ~ 2015. 12. 11.
○ 공사위치 : 홍체천(유진상가~KT전화국), 창릉천(싸릿말교 ~ 지축교 하류)
○ 시 공 사 : 소니종건(주)
○ 도 급 비 : 일금 오억구천이백삼십만구천일백원정(\ 592,309,100)
※ 도급비 변경없음
○ 설계변경사유
▶ 공사구간 일부 변경 당초 D=500~800mm L=389m, 변경 D=500~800mm L=327.2m(물재생과-3385, 2015.8.18)
▶ 기타 물량 정산(U.V공법)
명 칭	규 격	단 위	당 초	변 경	증,감		비 고
전체보수공
1. 진입로 개설 및 철거
진입로 개설 및 철거		식	1	1
2. 관로조사
하수관내CCTV조사	(Φ800mm미만)	m	943.7	856.5	감	87
하수관내CCTV검사및 보고서작성	(Φ800mm미만)	m	943.7	856.5	감	87
하수관내육안조사	(Φ800mm이상)	m	244.9	291.9	증	47
하수관내육안검사및 보고서작성	(Φ800mm이상)	m	244.9	291.9	증	47
3. 비굴착 전체보수 (턴영공법)
비굴착 전체보수	(턴영공법)	식	1	1
4. 전체보수 비굴착 (U.V공법)
견인삽입공	Φ500mm	M	131.2	44.0	감	87
견인삽입공	Φ700mm	M	13.0	11.8	감	1
견인삽입공	Φ800mm	M	244.9	283.2	증	38
확경공	Φ500mm	M	131.2	44.0	감	87
확경공	Φ700mm	M	13.0	11.8	감	1
확경공	Φ800mm	M	244.9	283.2	증	38
자외선경화공	Φ500mm	M	131.2	44.0	감	87
자외선경화공	Φ700mm	M	13.0	11.8	감	1
자외선경화공	Φ800mm	M	244.9	283.2	증	38
라이너(튜브)제작공	Φ500mm×5t	M	131.2	44.0	감	87
라이너(튜브)제작공	Φ700mm×7t	M	13.0	11.8	감	1
라이너(튜브)제작공	Φ800mm×8t	M	244.9	283.2	증	38
라이닝관 절단	Φ500mm	개소	6	2	감	4
라이닝관 절단	Φ700mm	개소	2	2		-
라이닝관 절단	Φ800mm	개소	10	16	증	6
관입구마무리공	Φ500mm	개소	6	2	감	4
관입구마무리공	Φ700mm	개소	2	2		-
관입구마무리공	Φ800mm	개소	10	16	증	6
연결관절단공	Φ800mm이상	개소	-	1	증	1
연결관천공공	Φ800mm이상	개소	-	1	증	1
관로세척공	Φ800mm미만	M	144.2	55.8	감	88
관로세척공	Φ800mm이상	M	244.9	283.2	증	38
물돌리기공	Φ300mm~1500mm	개소	18	36	증	18
물막이공 p.p 마대만들 기, 쌓기 및 헐기	Φ500mm	개소	6	4	감	2
물막이공 p.p 마대만들 기, 쌓기 및 헐기	Φ700mm	개소	2	4	증	2
물막이공 p.p 마대만들 기, 쌓기 및 헐기	Φ800mm	개소	10	32	증	22
준설토 운반	유입펌프장 ~ 사업소내	㎥	-	39	증	39
5. 비굴착 맨홀보수
비굴착 맨홀보수		식	1	1
6.부대공
가설휀스	(L=1.8M,H=1.45)	개당	18	18		-
품질시험비	(비굴착공)	회	4	6	증	2
안전감시원	보통인부 2인	일	24	38	증	14
맨홀인버트설치	(원형1호)	개소	26	26		-
맨홀인버트설치	(원형2호)	개소	1	1		-
맨홀인버트설치 물돌리기	(Φ250-1500mm)	Hr	112	150	증	38
맨홀인버트설치 물막이공	pp마대쌓기 (Φ450mm)	개소	15	15		-
맨홀인버트설치 물막이공	pp마대쌓기 (Φ500mm)	개소	2	4	증	2
맨홀인버트설치 물막이공	pp마대쌓기 (Φ700mm)	개소	5	4	감	1
맨홀인버트설치 물막이공	pp마대쌓기 (Φ800mm)	개소	6	32	증	26
실명제판	(하수도및맨홀용)	개소	16	30	증	14
공사안내판	0.9*1.8	개소	1	2	증	1
공사안내판	0.45*0.9	개소	1	2	증	1
교통안전표지판설치	600*200*600mm (오각)	개소	2	2		-