설계변경 사유서

1. 용역개요

가. 공 사 명 : 2014년 강북정수센터 취,정수장 조경관리 용역

나. 도 급 자 : 미래조경(주)  대표 김동수

다. 공사기간 : 2014. 04. 07 ~ 12. 22

라. 용역개요

▸ 잔디깎기    22,074㎡       ▸ 풀 깍기  557,279㎡

▸ 풀 뽑기     48,105㎡       ▸ 잔재처리    186회

▸ 교목전정     1,030주      ▸ 관목전정   4,733㎡

마. 계약금액

- 당초 : 169,796,240원

- 변경 : 155,660,000원

2. 설계변경 사유

가. 주요공종 변경사항

- 풀깍기 및 풀뽑기 횟수조정으로 물량 감소발생

- 폐기물 운반물량과 넝쿨 및 낙엽제거 물량의  증가

- 소나무 전정 및 고사목 제거 신규발생

- 국민 및 연금보험료 미납부에 대한 감액

나. 주요 물량 변경사항

공 종	단위	수 량		증, 감
		당 초	변 경	증	감
잔디깍기	㎡	22.074	7,358		14,716
풀깍기	㎡	557.279	389,986		167,293
풀뽑기	㎡	48.105	34,913		13,192
잔재처리	회	186	235	49
교목 전정	주	1,030	1,294	264
관목전정	주	4,733	3,626		1,107
소나무, 가로수 전정	주	16	343	327