설계변경 사유서(제1회)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 석관동 한천마을 주거환경관리사업 정비기반시설공사

○ 공사기간 : 2018.09.17.~ 2019.03.16.

○ 공사개요 : 주거지 가로환경 개선(하수관개량, 노후 포장개선 등)

○ 도 급 액 : 537,960,650원

○ 도 급 자 : 을묘종합건설(주) 대표 임주현

□ 설계변경사유

○ 관련근거 : 도시재생디자인과-5770(2018. 6.29.) 설계변경 및 예산조치 계획 보고

○ 현장실정 반영 및 사업계획 변경에 따른 공사물량 변동 발생

□ 설계변경 내역

(단위 : 원)

공 종	변 경 전	변 경 후	증 감
도 로 공	144,509,243	196,488,518	증 51,979,572
상하수도공	182,887,908	182,887,908	0
조 경 공	16,182,137	16,182,137	0
소 계	343,579,288	395,558,563	증 51,979,275
제 경 비	145,475,849	176,791,437	증 31,315,588
공 급 가 액	489,055,137	572,350,000	증 83,294,863
부가가치세	48,905,513	57,235,000	증 8,329,487
도급비(토목)	537,960,650	629,585,000	증 91,624,350
관급자재비	412,664,000	551,425,070	증 138,761,070
총 공 사 비	950,624,650	1,181,010,070	증 230,385,420

2018. 12.

도시재생디자인과장  임 승 락 (인)

성북구(분임) 재무관  귀하