설 계 변 경 사 유 서(3회)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 구소규모 편익시설(도로포장) 설치공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2021.03.31. ~ 2021.12.31.

○ 도 급 자 : 옹동건설(주) 대표 원창희

□ 설계변경 사유 : 단순 시공(계약) 물량 증·감 발생

□ 설계변경 내용

구 분	당 초		변 경		증 감
아스팔트 포장정비	153	a	221	a	증	68	a
보도블록 포장정비	40	a	60	a	증	20	a
경계석 설치	2,100	m	3,300	m	증	1,200	m

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
총사업비	1,699,100,000	2.372,100,000	증	673,000,000
도 급 비	873,000,000	1,273,000,000	증	400,000,000
관 급 비	645,100,000	795,100,000	증	150,000,000
이 전 비	181,000,000	304,000,000	증	123,000,000

2021.  09.

도로과장  송 승 익 (인)

성북구(분임)경리관  귀하