설계변경 사유서 (제1회)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2018년 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018. 3. 29. ~ 2018. 12. 31.

○ 공사개요 : 아스팔트 포장 10a, 콘크리트포장 4a, 보도블록포장 15a

○ 총공사비 : 815백만원(도급비 345백만원, 관급비 282백만원, 이전비 188백만원)

○ 도 급 자 : 명운산업(주) 대표  김경희

□ 설계변경사유

○ 공사 시공 물량 변경

○ 주요공종 시공물량 증·감 내역

- 아스팔트 포장       A=10a  →  A=40a(증 20a)

- 콘크리트 포장       A=4a   →  A=4a(감 0)

- 보도블록포장         A=15a  →  A=15a(증 0)

- 기타 1식

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감 내역	비 고
총공사비	815,384,000	1,112,697,000	증) 297,313,000
도 급 비	345,384,000	642,697,000	증) 297,313,000
관 급 비	282,016,690	282,016,690
이 전 비	187,983,310	187,983,310

2018. 7.

도로과장 최 광 천