설계변경 사유서 (제3회)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2017년 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 3. 31. ~ 12. 31.

○ 공사개요 : 아스팔트 포장 172a, 콘크리트포장 9a, 보도블록포장 34a

○ 총공사비 : 1,497백만원(도급비 797백만원, 관급비 324백만원, 이전비 376백만원)

○ 도 급 자 : 건희건설(주) 대표  이종미

□ 설계변경사유

○ 공사 시공 물량 변경

○ 주요공종 시공물량 증·감 내역

- 아스팔트 포장       A=172a  →  A=203a(증 31a)

- 콘크리트 포장       A=9a   →  A=2a(감 5a)

- 보도블록포장         A=34a  →  A=34a(증 0)

- 제설대책 1식

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감 내역	비 고
총공사비	1,497,000,000	1,721,000,000	증) 224,000,000
도 급 비	796,816,000	1,173,579,000	증) 376,763,000
관 급 비	324,264,600	325,266,540	증) 1,001,940
이 전 비	375,919,400	222,154,460	감) 153,764,940

2017. 12.

도로과장 최 광 천