설계변경사유서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 중계역~노원구민회관간 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : D = 600mm, L = 1,367m

○ 공사기간 : 2016. 5. 10 ～ 2014. 12. 28

○ 도 급 액 :                                                      (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ‧ 감
총 부기금액 (계약금액)	730,959,520	692,350,000	감) 38,609,520

○ 도 급 자 : (주)치산치수  대표 박홍자

○ 감 독 자 : 시설관리공단 이인엽

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 실정보고에 의한 신규단가 발생 및 물량 증감

▷ 관련 근거 : 공사감독2처-6959(2016.6.29)

· 내     용 : 퇴수밸브 2개소 설치

▷ 관련 근거 : 공사감독2처-17373(2016.12.7)

· 내     용 : 연결부 및 분기부 토공증가, 충진작업구 토공 반영, 하수박스 코아 천공

○ 건강 및 노인장기요양보험료, 연금, 퇴직공제부금 실납부 금액 정산 반영

○ 주요공종 변경사항

공 종 명	규 격	단위	수 량		비 고 (증.감)
			당 초	변 경
터파기(기계100% 불량)	굴삭기 0.7㎥	㎥	2,592	2,979	증) 387
KP이탈방지압륜 접합	600㎜ 야간	개소	154	209	증) 55
강관 절단공	700㎜	개소	36	10	감) 26
기계기구 플랜트설치 및 철거	야간	회	11	7	감) 4

○ 기타 실시공 수량에 따른 변경