설계변경 사유서(최종-4차)

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2013년 북부관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : 아스팔트포장(중층, 표층) 302.36a, 콘크리트포장 0.43a

소형고압블록 2.51a

다. 계약기간 : 2013.05.08 ~ 2014.05.30

라. 도 급 자 : (주)엔에스이엔지  대표 박경준

마. 감 리 자 : (주)건양이앤지  김인중

바. 계약금액

<총 부기금액 >

- 당초 : 금1,192,929,980원

- 변경 : 금1,190,695,000원 (감2,234,980원)

2. 보고내용

가. 2013년도 포장공사 최종정산 결과 시공물량 증 ․ 감에 따른 설계변경임

○ 시공물량 증. 감 조정 : 인력터파기 및 아스팔트포장(소폭띠모양) 등

○ 건강보험료 등 정산 (감액)

나. 주요변경물량 현황

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	인력터파기	620㎥	702㎥	증
	아스팔트포장(소폭띠모양) - 50㎡이하	3a	11.9a	증
	아스팔트절삭(노면파쇄기)	40a	36.5a	감
	건강보험료 정산	6,768,043원	474,150원	감
	연금보험료 정산	9,913,192원	742,500원	감
	산업안전보건관리비	17,926,877원	10,511,754원	감

* 세부내용 : 별첨 내역서 참조

3. 처리의견

○ 상기 공종 수량변경(증,감) 및 보험료 정산에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 처리하고자 합니다. 끝.