설계변경사유서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2013년 노원구 관내 상수도공사(단가계약)-2차

○ 공사개요 :

• 당초 : D = 13 ~ 300mm, L = 1,678m

• 변경 : D = 13 ~ 300mm, L = 977m

○ 공사기간 : 2014. 1. 8 ～ 2014. 6. 30

○ 도 급 자 : (주)백두이엔지  대표 김재기

○ 도 급 액 : 증감 없음                                             단위 : 원

구 분	당 초	변 경	증 . 감
총 부기금액 (도 급 비)	399,403,690	360,987,000	-38,416,690

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 공사시행에 따른 신규공종 발생 및 물량 증・감 발생.

가. 계약 물량 변경

- 신규공종 : 아스팔트 포장절단(야간) 등 95개 공종

- 물량증가 : 인력 터파기 등 76개 공종

- 물량감소 : 아스팔트 포장절단 등 322개 공종

나. 기타 변경 및 실시공 수량