설계변경사유서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[ 현    황 ]

○ 공 사 명 : 4.19묘지삼거리 ~ 4.19배수지간 세척갱생관정비공사

○ 공사개요

․ **********************************************

․ ********************************************** (증 26m)

*****************************************

○ ******************************

○ ******

․ *********************

․ *********************

․ 감  액 : 금  23,531,000원

○ ***************************

○ 감 리 자 : 서울시설관리공단 공사감독2처 이경성

[ 설계변경 내용 및 사유 ]

○ 신공종 및 시공물량 증·감에 따른 변경

가. 신공종 발생

- 주철직관 부설공외 30공종 발생

나. 공사 중 물량 증·감 사항 발생

- 물량증가 : 아스팔트포장깨기(굴삭기 0.4㎥)외 54공종 증가

- 물량감소 : 콘크리트깨기(소형브레이커)외 27공종 감소

○ 설계변경 계약물량 증감 현황

**

구 분	신규공종	증가	감소	합 계	비 고
계	31	23	28	82
토공	2	14	11
부설공	27	4	8
구조물공	2	2
부대공		3	9

○ 신규공종 및 물량 증·감 현황 (별첨)

○ 기타 현장여건 변경에 따른 설계변경

○ 설계변경 금액내역                                               (단위 : 원)

**

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감(원)	비 고
도 급 비	***********	***********	**********000
공급가액	***********	***********	*************
부 가 세	**********	**********	*************