설계변경(제2회) 사전심의 요청서

접수번호	제 호

공사명	2014년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속단가계약)

심의일시 : 2014. 12.

심의장소 : 급수운영과

강남수도 사업소

(급수운영과)

설계변경(제2회) 사유서

공사개요

❍ 공 사 명 : 2014년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속단가계약)

❍ 공사규모 : 노후밸브정비 142개소, 소화전정비 25개소, 기타 53개소

❍ 계약기간 : 2014.04.22 ~ 2015.04.30

❍ 도 급 비 : 금624,961,000원(변경 없음)

❍ 도 급 자 : 상협건설 대표 주상호

설계변경 세부내용 및 사유

❍ 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 물량증가 : 기계다짐(보통)(콤펙터 1.5ton)공정 등 11개 공정

- 물량감소 : 고압블록 포장걷기(면적10㎡미만) 공정 등 67개 공정

- 제경비 조정 : 물량 증ㆍ감에 따른 금액변경 9개 항목 발생

❍ 신규공정에 따른 계약물량 조정

- 신규공정 : 주철(이형관)부설공(900mm) 등 28개공정

설계변경 내역                                     (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증ㆍ감
도 급 비	624,961,000	624,961,000	-
공 급 가 액	568,146,364	568,146,364	-
부가 가치세	56,814,636	56,814,636	-

따로붙임 : 설계변경(제2회) 내역서 1부.  끝.

심의위원회 의견

◦ "2014년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속단가계약)" 설계변경(제2회)에 따른 사전 심의 결과 다음과 같이 의견을 제시함

구 분	직 위	의 견	확 인
위 원 장	급수운영과장
위 원	급수운영과
위 원	급수운영과
위 원	급수운영과
위 원	급수운영과

2014. 12.