설계변경 사유서

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2015년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)

나. 공사개요 : 화강석 포장보수 600㎡, 차도줄눈정비 120a

다. 도 급 비 : 577,812,000원

라. 공사기간 : 2015. 4. 21 ~ 2015. 12. 31

마. 도급업체 : ㈜자오건설  대표  이기완

2. 설계변경 사유

○ 추가 재배정 예산 및 집행잔액 사용계획(도로보수과-9143, ‘15.9.16)

- 돌포장 보수에 따른 추가 재배정 예산(100백만원) 사용

○ 서울시 예방적 유지보수사업 추진계획 (도로관리과-1516(2015.9.24.)

- 돌포장 보수에 따른 추가 예산 재배정 (120백만원)

○ 주요 변경내역

공 종	단위	당초	변경	비 고
화강석 보수	㎡	860	1,277.8
차도 줄눈정비	a	50	8.1
화강석 포장 줄눈	㎡	860	1,277.8
석재포장 절단	㎡	2,778	2,784

3. 설계변경 금액

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증, 감
총 공 사 비		680,000,000	908,000,000	증)228,000,000
도급비	공 급 가 액	525,283,637	725,919,946	증)200,636,309
	부가 가치세	52,528,363	72,591,994	증) 20,063,631
	계	577,812,000	798,511,940	증)220,699,940
관 급 비		102,188,000	109,488,060	증) 7,300,060
이 전 비		-	-	-

4. 조치계획

○ 상기 내용과 같이 정비물량 증ㆍ감에 따른 정산 설계변경을 시행코자 함.