설계변경 사유서

1. 공 사 개 요

가. 공 사 명 : 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

나. 공사개요 : 차선도색 228,600m, 차선제거 6,000m

도로표지병 설치 100개, 도로표지병 제거 50개

다. 도 급 비 : 474,557,000원

라. 공사기간 : 2016. 03. 08 ~ 2016. 12. 31

마. 도급업체 : 태경건설     대표  정 태 영

2.  설계변경 사유

○ 자전거도로 횡단도 및 공공 자전거도로 유지보수 관련 예산 추가 재배정

○ 연간단가 공사 중 물량 변경에 따른 노면표시 수량 변경

- 노면표시 변경내역

공 종	규격	단위	당초	변경	증감		비고
백색실선	수동식	m	20,400	35,197	증)	14,797
백색파선	수동식	m	47,600	44,876	감)	2,724
황색실선	수동식	m	31,300	21,441	감)	9,859
황색파선	수동식	m	4,900	17,980	증)	13,080
청색실선	수동식	m	4,300	7,600	증)	3,300
청색파선	수동식	m	2,800	6,810	증)	4,010
문자/기호	수동식	m	47,000	52,154	증)	5,154
횡단보도	수동식	m	70,500	95,380	증)	24,880
제 거	수동식	m	6,000	10,226	증)	4,226
합 계		m	234,800	291,664	증)	56,864

- 표지병 변경내역

공 종	종 류	당초	변경	증감		비고
도로표지병 설치	130×110×30	100	100		-
도로표지병 제거	130×110×30	50	50		-
합 계		150	0		-

3. 설계변경 금액

구 분		설계변경 금액(원)		증․감(원)	비 고
		당 초	변 경
총공사비		749,379,000	903,650,450	증) 154,271,450
도급액	공급가액	431,415,455	560,450,000	증) 129,034,545
	부가세	43,141,545	56,045,000	증) 12,903,455
	계	474,557,000	616,495,000	증) 141,938,000
관급자재비		274,822,000	287,155,450	증) 12,333,450

4. 검토의견

○ 자전거도로 추가 재배정 예산을 활용하여 자전거횡단도 설치 및 공공자전거도로 유지보수에 따른 노면표시를 정비코자 하며, 교통안전시설(노면표시) 유지보수를 위한 유형별 수량 조정에 따른 추가 비용은 낙찰차액(73,221천원)을 활용 예산범위내에서 설계변경 시행후 공사추진에 만전을 기하고자 함.